울산광역시 고시 제2007 - 34호

산업단지개발사업 실시계획변경(사업기간연장)승인 고시

울산․미포국가산업단지 내 산업단지개발사업에 대하여 「산업입지 및 개발에 관한 법률」제17조의 규정에 의거 아래와 같이 실시계획(변경) 승인하고, 같은 법 제19조의2 규정에 의거 고시합니다.

2007.  3.  8.

울산광역시장

번호	업체명	위치	면적(㎡)	기간연기		연기사유	비고
				당초	변경
1	(주)동주상사 대표이사 김종렬	북구 효문동 682-5일원	206	‘04.6 ~ ‘06.6.30	‘04.6 ~ ‘07.6.30	사업마무리 지연
2	강서종합폐차장 박서효	북구 효문동 325-2일원	10,246	‘98.10 ~ ‘06.12.31	‘98.10 ~ ‘07.12.31	토지매입지연
3	진명이십일(주) 노성왕	북구 효문동 349-2일원	2,049	‘05.11 ~ ‘06.12.31	‘05.11 ~ ‘07.12.31	토지매입지연
4	대원강업(주) 대표이사 성열각	북구 효문동 429-1일원	4,979	‘95.7 ~ ‘06.12.31	‘95.7 ~ ‘07.12.31	사업마무리 지연