- 산업로 (신답교 ~ 경주시계) 확장공사 구간 내 -

북구 이화사거리 육교 철거계획

<2018. 8. 24.(금)>

□ 공사개요

❍ 공 사 명 : 산업로(신답교~경주시계) 확장공사

❍ 위    치 : 북구 신천동 신답교 ~ 경주시계

❍ 공사내용 : 도로확장 L= 4.63km, B= 20→30m (4→6차로)

❍ 공사기간 : 2016. 09. 05 ~ 2021. 03. 04. (54개월)

❍ 총공사비 : 87,314백만원

❍ 감리단/시공사 : ㈜서영엔지니어링 외 2개사 / ㈜효성 외 2개사

□ 육교현황

육교명칭	위 치	연장	높이	설치년도	비고
현대글로리아 육교	북구 농소2동 현대글로리아APT 앞 (산업로, 이화사거리)	27.1m	5.7m	1993년

□ 철거계획(일정)

❍ 8월 27일 : 육교 철거 안전시설물(보호막 등) 설치

❍ 8월 27일 ~ 29일 : 계단 및 상판 콘크리트 철거

❍ 8월 30일 : 계단 철거(10시부터 시작, 주간작업)

❍ 8. 30 22:00 ~ 8. 31. 04:00 : 육교 상판 철거 (야간작업)

산업로 이화사거리 전면통제 : 8월 31일,  03:00 ~ 03:10  (10분간)

※울산지방경찰청, 중부경찰서, 교통관리센터 등 관계기관 협조체제 구축·시행

❍ 8월 31일 : 잔여구조물 철거(육교 철거 완료)

위치도 및 사진

□ 위치도

이화사거리

현대글로리아아파트

□ 육교전경