울산광역시 고시 제2008 - 280호

울산도시계획시설(도로:대로2류21호선)사업

실시계획 변경 고시

울산광역시 고시 제2004-12호(2004.1.15)로 실시계획 고시된 울산도시계획시설(도로:대로2류21호선)사업에 대하여「국토의 계획 및 이용에 관한 법률」제88조에 따라 실시계획을 변경하고 같은 법 제91조 및 같은 법 시행령 제100조에 따라 아래와 같이 고시합니다.

2008년   11월   27일

울 산 광 역 시 장

1. 위  치 : 울산광역시 북구 연암동~매곡동 일원

2. 사업의 종류

가. 종  류 : 울산도시계획시설(도로:대로2류21호선)사업

나. 명  칭 ┌ 당초 : 산업로배면도로(연암I/C~농소2I/C)개설공사

.        └ 변경 : 오토밸리로 2공구(연암IC~농소2IC)개설공사

3. 사업규모  ┌ 당초 : 도로개설 L=6.32km, B=30m

.           └ 변경 : 도로개설 L=4.82km, B=30m(일부구간 제척 L=1.5km)

※변경사유 : 송정지구 택지개발사업 연접구간인 오토밸리로 2공구 2구간(L=1.5km, B=30m)은 “광역교통개선대책”에 따라 한국토지공사에서 사업시행

4. 사업시행자의 성명 및 주소

가. 성  명 : 울산광역시장

나. 주  소 ┌ 당초 : 울산광역시 남구 신정1동 646-4번지

.        └ 변경 : 울산광역시 남구 중앙로 182

5. 사업기간 : 착수일로부터 48개월(변경없음)

6. 수용 또는 사용할 토지․건물의 소유권과 소유권 외의 권리의 명세 : 게재 생략

7. 기타 상세한 사항은 울산광역시 종합건설본부 시설부(☏229-5832, 5834)로 문의하시기 바랍니다.