(완료)정책실명제 중점관리 대상사업 사업내역서

① 정책사업명	호계 문화체육센터 건립
② 추진배경	○ 도농복합지역에서 대단위 아파트 신축 등으로 주민들의 문화체육시설 수요가 증가하고 있으나 문화체육시설 부족 ○ 생활체육시설 인프라 확충으로 주민 건강증진과 여가생활 향상을 위하여 문화체육센터 건립 필요
③ 사업개요	○ 위 치 : 북구 창평동 386-1번지 일원 ○ 사업규모 : 부지면적 9,280㎡, 지하1층‧지상2층, 연면적 2,860㎡ ○ 주요시설 : 수영장, 헬스장, 탁구장, 사무실 등 편익시설 ○ 사 업 비 : 14,000백만원(국 3,200 시 5,050 구 5,750)
④ 사업부서	행정지원국 문화체육과		⑤ 담당자	행정5급 박은정 시설7급 장해정
⑥ 선정기준	총사업비 10억 이상		⑦ 사업기간	‘13. 1월 ~ ’21. 3월
<그간 주요 추진내용>
○ 체육센터 조성 관련 농소1동 주민의견 수렴		‘14. 9월	박천동 구청장 이형조 부구청장 구일우 행정관리국장 김정열 문화체육과장 안성범 체육지원주무관 장명섭 주무관
○ ‘17. 2월 : 도시관리계획 (문화시설) 결정 및 지형도면 고시 ○ ‘17. 3월 : 부지 분할 측량 ○ ‘17. 5월 : 주민설명회(1차) ○ ‘17. 6월 : 주민설명회(2차) 및 토지보상 열람공고			박천동 구청장 임상진 부구청장 곽병주 행정관리국장 김기항 문화체육과장 김형철 체육지원주무관 박한수 주무관
○ ‘17. 7월 : 설계용역시행 계획 보고 및 토지감정평가․보상 ○ ‘17. 8월 : 설계공모 공고 ○ ‘17. 9월 : 설계공모 착수 ○ ‘17. 11월 : 작품접수 ○ ‘17. 12월 : 심사위원회 개최, 당선작 선정, 응모작품전시 ○ ‘18. 1월 : 실시설계용역 착수 ○ ‘18. 6월 : 실시계획인가 고시 ○ ‘18. 7월 : 수용재결 신청 (울산시 지방토지수용위원회) ○ ‘18. 10월 : 공유재산심의회 변경심의 ○ ‘18. 11월 : 수용개시 및 보상금 공탁			이동권 구청장 정호동 부구청장 최필선 행정관리국장 김기항 문화체육과장 조영진 체육지원주무관 이덕봉 주무관
○ ‘19. 3월 : 진입도로 개설공사 준공 ○ ‘19. 5월 : 공사 착공			이동권 구청장 최수미 부구청장 윤일호 행정관리국장 정미옥 문화체육과장 조영진 체육지원주무관 김경륜 주무관
○ 공사 준공		‘20. 9월	이동권 구청장 최수미 부구청장 김기항 행정관리국장 정미옥 문화체육과장 전민성 체육지원주무관 김경륜 주무관
○ 개관식 개최		‘21.03.04.	이동권 구청장 김정익 부구청장 조여문 행정관리국장 박은정 문화체육과장 박완호 체육지원주무관 장해정 주무관