울산광역시 고시 제2009-14호

산업단지개발사업 실시계획변경(기간연장)승인 고시

울산․미포국가산업단지 내 산업단지개발사업에 대하여 「산업입지 및 개발에 관한 법률」제17조의 규정에 의거 아래와 같이 실시계획(변경) 승인하고, 같은 법 제19조의2 규정에 의거 고시합니다.

2009.  1.  15.

울산광역시장

상호 및 대표자	위치	면적(㎡)	시행기간		연기사유
			당초	변경
삼진정공(주)	북구 연암동 643번지 일원	30,236	1990. 8.～ 2008.12.31	1990. 8.～ 2009.12.31	보상협의지연
한일이화(주)	북구 연암동 563-4번지 일원	11,022	2000. 10.～ 2007.12.31	2000. 10.～ 2009.12.31	기반시설 미설치
한국수력원자력(주)	북구 효문, 연암동 일원	74,040	1996. 4.～ 2008.12.31	1996. 4.～ 2009.12.31	사업시행구역 변경(조정)협의
강서종합폐차장	북구 효문동 325-2번지 일원	10,246	1998. 9.～ 2008.12.31	1998. 9.～ 2009.12.31	보상협의지연
새한주유소	북구 명촌동 222번지 일원	5,101	2005.10.～ 2008.12.31	2005.10.～ 2009.6.30	부대시설물 미설치
명성공업(주)	북구 진장동 935-3번지 일원	5,844	2004. 4.～ 2008.12.31	2004. 4.～ 2009.12.31	편입토지 미확보
연암물류	북구 연암동 821-9번지 일원	1,055	2006. 7.～ 2008.12.31	2006. 7.～ 2009.12.31	부지정지시행중
가득주유소	북구 연암동 1357번지 일원	2,207.8	2007. 3.～ 2008.12.31	2007. 3.～ 2009.6.30	가감속차로 보완
연암자동차 운전학원	북구 연암동 636번지 일원	12,181	1996.10.～ 2008.12.31	1996.10.～ 2009.12.31	편입토지 미확보
현대자동차(주)	북구 양정동 336번지 일원	370,853	1985.2.～ 2008.12.31	1985.2.～ 2009.12.31	계획도로 변경검토중
현대자동차(주)	북구 효문동 615번지 일원	10,752	1997.5.～ 2008.12.31	1997.5.～ 2009.12.31	‘09년도 준공예정
현대자동차(주)	북구 양정동 367-1번지 일원	67,359	1986.5.～ 2008.12.31	1986.5.～ 2009.12.31	‘09년도 준공예정
현대자동차(주)	북구 염포동 423-1번지 일원	343,194	1986.7.～ 2008.12.31	1986.7.～ 2009.12.31	지적정리중 ‘09년도 준공
우영산업(주)	북구 연암동 714-15번지 일원	21,296	1985.11.～ 2008.12.31	1985.11.～ 2009.12.31	부대시설물 미설치

상호 및 대표자	위치	면적(㎡)	시행기간		연기사유
			당초	변경
동국실업(주)	북구 연암동 691-1번지 일원	4,228	2006.7.～ 2008.12.31	2006.7.～ 2009.12.31	부대시설물 미설치
동성공업(주)	북구 효문동 353-5번지 일원	8,062	1984.1.～ 2008.12.31	1984.1.～ 2009.12.31	지장물미철거
(주)한국자산개발	북구 연암동 663-30번지 일원	15,021	2005.12.～ 2008.12.31	2005.12.～ 2008.12.31	편입토지 미확보
시민의발서비스(주)	북구 효문동 746-1번지 일원	9,082	1992.10.～ 2008.12.31	1992.10.～ 2008.12.31	편입토지 미확보
(주)한일	북구 효문동 769-5번지 일원	6,779.7	2007.4.～ 2008.12.31	2007.4.～ 2008.12.31	편입토지 미확보
한국TRW자동차부품산업(주)	북구 효문동 753번지 일원	11,019	2008.9.～ 2008.12.31	2008.9.～ 2009.12.31	편입토지 미확보
대소정공	북구 효문동 434-6번지 일원	75	2004.4.～ 2008.12.31	2004.4.～ 2009.12.31	편입토지 미확보