울산광역시 북구 고시 제2019 - 17호

도시계획시설(도로, 완충녹지)사업 실시계획(변경)인가 고시

도시계획시설(도로, 완충녹지)사업에 대하여「국토의 계획 및 이용에 관한 법률」제88조 및 같은 법 시행령 제97조에 따라 도시계획시설사업 실시계획(변경)인가하고, 같은 법 제91조 및 같은 법 시행령 제100조에 따라 아래와 같이 고시합니다.

2019년  1월  24일

울산광역시 북구청장

1. 사업시행지의 위치(변경없음)

◦ 울산광역시 북구 산하동 145번지 일원

2. 사업의 종류 및 명칭

◦ 종  류 : 도시계획시설(도로, 완충녹지)사업

◦ 명  칭 : 강동산하지구 도시개발사업 구역외 도시계획시설사업

3. 사업개요

사 업 명			시설내역	면 적(㎡)	비 고
합 계	기정	-	-	155,520.0
	변경	-	-	147,133.6	감) 8,386.4
진입도로	기정	대로2-29호선	L=890m, B=30m	32,788.0
	변경	대로2-29호선	L=890m, B=30m	28,702.3	감) 4,085.7
진출입 램프	기정	소로1-17호선	L=200m, B=11m	2,013.0
	변경	소로1-95호선	L=200m, B=11m	2,314.7	증) 301.7
	기정	소로3-1호선	L=355m, B=5.5m	11,124.0
	변경	소로3-59호선	L=355m, B=5.5m	10,701.1	감) 422.9
	기정	소로3-2호선	L=400m, B=5.5m	2,029.0
	변경	소로3-60호선	L=400m, B=5.5m	2,630.2	증) 601.2
완충녹지	기정	282호	L=1,600m, B=70m	107,566.0
	변경	300호	L=1,600m, B=70m	102,785.3	감) 4,780.7

4. 사업시행자의 성명 및 주소(변경없음)

◦ 성  명 : 강동산하지구 도시개발사업 조합장

◦ 주  소 : 울산광역시 북구 정자동 424-2번지

5. 사업기간(변경)

◦ 기정 : 2007. 01. 04. ~ 2016. 12. 31.

◦ 변경 : 2007. 01. 04. ~ 2019. 06. 30

6. 수용 또는 사용할 토지·지번·지목 및 소유권이외의 권리의 명세서 : 생략

7.「국토의 계획 및 이용에 관한 법률」 제99조의 규정에 의한 공공시설 등의 귀속 및 양도에 관한 사항 : 변경없음

8. 관계도서 게재는 생략하며, 기타 상세한 사항은 울산광역시 북구 도시과(☎052-241-7912)로 문의하시기 바랍니다.