울산광역시 고시 제2006-37호

산업단지개발사업 실시계획변경【기간연장】승인고시

울산․미포국가산업단지 내 산업단지개발사업에 대하여 산업입지 및 개발에관한법률 제17조의 규정에 의거 아래와 같이 실시계획변경(기간연장)승인하고, 같은법 제19조의2 규정에  의거 고시합니다.

2006년 2월 23일

울 산 광 역 시 장

1. 기간연장 내역

상호 및 대표자	사업위치	면적(㎡)	시행기간		연기사유
			당초	변경
세종공업(주) 박 이 식	북구 효문동 305번지일원	9,514 (변경없음)	‘94.07.16~ ‘05.12.31	‘94.07.16~ ‘06.12.31	보상협의 지연
한국TRW자동차부품산업(주) 오동신	북구 효문동 753번지일원	11,048 (변경없음)	‘87.06.08~ ‘04.12.31	‘87.06.08~ ‘06.12.31	보상협의 지연
오성종합기계 도 재 근	북구 효문동 769-1번지일원	6,757 (변경없음)	‘03.05.21~ ‘05.12.31	‘03.05.21~ ‘06.12.31	자금난으로 부지매입 지연
시발자동차정비공업(주) 김성주	북구 효문동 746-1번지일원	9,082 (변경없음)	‘92.10.15~ ‘05.12.31	‘92.10.15~ ‘06.12.31	보상협의 지연
강서종합폐차장 박 서 효	북구 효문동 325-2번지일원	10,246 (변경없음)	‘98.10.14~ ‘04.12.31	‘98.10.14~ ‘06.12.31	보상협의 지연
세동교통(주) 정 상 재	북구 연암동 646-4번지일원	8,055 (변경없음)	‘04.05.12~ ‘05.12.31	‘04.05.12~ ‘06.12.31	보상협의 지연
(주)용산 전 운 장	북구 연암동 495-3번지일원	2,396 (변경없음)	‘91.01.~ ‘05.12.31	‘91.01.~ ‘06.12.31	준공인가신청 준비중
우영산업(주) 김 영 호	북구 연암동 714-15번지 일원	21,296 (변경없음)	‘85.11.25~ ‘05.12.31	‘85.11.25~ ‘06.12.31	보상협의 지연
삼진정공(주) 어 진 선	북구 연암동 643번지일원	30,236 (변경없음)	‘90.08.13~ ‘05.12.31	‘90.08.13~ ‘06.12.31	보상협의 지연
두올상사(주) 윤 용 수	북구 효문동, 286번지일원	8,398 (변경없음)	‘87.02.17~ ‘05.12.31	‘87.02.17~ ‘06.12.31	보상협의 지연
상호 및 대표자	사업위치	면적(㎡)	시행기간		연기사유
			당초	변경
연암자동차운전학원 전 현 석	북구 연암동 636번지일원	12,181 (변경없음)	‘98.09.18~ ‘04.12.31	‘98.09.18~ ‘06.12.31	보상협의 지연
현대자동차(주) 김 동 진	북구 양정동 336번지일원	370,853 (변경없음)	‘85.02.~ ‘05.12.31	‘85.02.~ ‘06.12.31	실시계획 조건이행
현대자동차(주) 김 동 진	북구 염포동 423-1번지일원	343,194 (변경없음)	‘86.07.~ ‘05.12.31	‘86.07.~ ‘06.12.31	실시계획 조건이행
현대자동차(주) 김 동 진	북구 효문동 615번지일원	10,752 (변경없음)	‘97.07.30~ ‘05.12.31	‘97.07.30~ ‘06.12.31	실시계획 조건이행
현대자동차(주) 김 동 진	북구 양정동 367-1번지일원	67,359 (변경없음)	‘86.05.~ ‘05.12.31	‘86.05.~ ‘06.12.31	실시계획 조건이행
대원강업(주) 허 재 철	북구 효문동 429-1번지일원	4,979 (변경없음)	‘95.07.03~ ‘05.12.31	‘95.07.03~ ‘06.12.31	자금부족으로 편입토지매입지연
태화주방 박 병 우	북구 효문동 270-5번지일원	6,443 (변경없음)	‘03.12.29~ ‘05.12.31	‘03.12.29~ ‘06.12.31	일부구간 부지정지 미완료
신영금속(주) 강 호 갑	북구 효문동 176-5번지일원	6,296 (변경없음)	‘04.07.08~ ‘05.12.31	‘04.07.08~ ‘06.12.31	보상협의 지연
현주열처리 변 충 호	북구 연암동 596-3번지일원	2,526 (변경없음)	‘85.02.21~ ‘05.12.31	‘85.02.21~ ‘06.12.31	보상협의 지연
신화기공사 김 영 억	북구 연암동 654-4번지일원	1,075 (변경없음)	‘91.03.19~ ‘03.12.31	‘91.03.19~ ‘06.12.31	자금부족으로 편입토지매입지연
(주)한 백 오 영 순	북구 연암동 179-3번지일원	3,792 (변경없음)	‘04.03.02~ ‘05.12.31	‘04.03.02~ ‘06.12.31	자금부족으로 편입토지매입지연

2. 수용․사용할 토지세목조서 : 변경없음

3. 관계도서는 울산광역시청 도시개발과와 북구청 도시교통과에 비치하고 이해 관계인에게 보입니다.(관계도서 게재 생략)