울산광역시 북구 공고 제2020-543호

미집행 도시계획시설 단계별 집행계획 공고

미집행 도시계획시설에 대하여「국토의 계획 및 이용에 관한 법률」제85조 및 같은 법 시행령 제95조에 따라 아래와 같이 단계별 집행계획을 수립하여 공고합니다.

2020년   4월  29일

울 산 광 역 시  북 구 청 장

1. 단계별집행계획 총괄

○ 시설별 총괄현황

(단위 : ㎡, 백만원)

구분	계			10년 이상(장기미집행)			10년 미만
	개소	면적	사업비	개소	면적	사업비	개소	면적	사업비
계	348	875,773	573,265	338	842,842	564,635	10	32,931	8,630
도로	333	796,543	542,345	325	771,865	536,756	8	24,678	5,589
공원	2	5,254	1,436	2	5,254	1,436	-	-	-
학교	4	48,527	18,201	4	48,527	18,201	-	-	-
기타	9	25,449	11,283	7	17,196	8,242	2	8,253	3,041

* 기타 : 공공공지, 주차장, 수도공급설비, 공공청사, 사회복지시설, 청소년수련시설

○ 연차별 집행계획

(단위 : 백만원)

구분	계	1단계	2-1단계	2-2단계
		(2020~2022)	(2023~2024)	(2025~)
계	573,265	26,478	460,781	86,006
도로	542,345	26,478	434,407	81,460
공원	1,436	-	882	554
학교	18,201	-	16,368	1,833
기타	11,283	-	9,124	2,159

* 기타 : 공공공지, 주차장, 수도공급설비, 공공청사, 사회복지시설, 청소년수련시설

2. 미집행 도시계획시설 단계별 집행계획 수립조서 : “별첨”

3. 사업시행기간

가. 1단계   : 2020년 ~ 2022년

나. 2-1단계 : 2023년 ~ 2024년

다. 2-2단계 : 2025년 이후

4. 기타사항

가. 기타 자세한 사항은 울산광역시 북구 도시과(☏052-241-7992)로 문의하여 주시기 바랍니다.

■ 미집행 도시계획시설 단계별 집행계획

연번	구분	시설명	사업개요	집행구분	최초결정일	면적(㎡)			총사업비 (백만원)	재원조달계획(백만원)							단계별사업비(백만원)
						합계	집행 면적	미집행 면적		합계	국비	시비	지방채	공기업	구군비	민간	소계	1단계	2-1단계	2-2단계
																		(2020~2022)	(2023~2024)	(2025이후)
합 계						875,773	232,428	643,345	573,265	573,265	-	20,719	-	1,916	550,630	-	573,265	26,478	460,781	86,006
1	도로	중로2-17	L=5,772m	부분집행	00.03.10.	86,580	41,533	45,047	15,181	15,181	-	-	-	-	15,181	-	15,181	-	8,604	6,577
2	도로	중로2-19	L=146m	부분집행	05.11.10.	2,628	1,298	1,330	501	501	-	-	-	-	501	-	501	-	307	194
3	도로	중로2-37	L=430m	부분집행	89.10.27.	6,450	4,274	2,176	1,916	1,916	-	-	-	1,916	-	-	1,916	1,598	318	-
4	도로	중로2-45	L=740m	부분집행	89년이전	11,100	6,310	4,790	699	699	-	-	-	-	699	-	699	-	-	699
5	도로	중로2-76	L=1,023m	미집행	04.12.04.	15,345	-	15,345	5,476	5,476	-	-	-	-	5,476	-	5,476	-	3,236	2,240
6	도로	중로2-122	L=590m	부분집행	00.03.04.	9,860	6,461	3,399	4,817	4,817	-	-	-	-	4,817	-	4,817	-	4,321	496
7	도로	중로2-125	L=773m	미집행	00.03.04.	11,595	-	11,595	10,179	10,179	-	-	-	-	10,179	-	10,179	-	8,486	1,693
8	도로	중로2-127	L=184m	미집행	00.03.04.	2,760	-	2,760	6,966	6,966	-	-	-	-	6,966	-	6,966	-	6,563	403
9	도로	중로2-128	L=77m	미집행	00.03.04.	1,155	-	1,155	2,637	2,637	-	-	-	-	2,637	-	2,637	-	2,468	169
10	도로	중로2-129	L=303m	미집행	00.03.04.	4,545	-	4,545	10,856	10,856	-	-	-	-	10,856	-	10,856	-	10,192	664
11	도로	중로2-130	L=400m	미집행	00.03.04.	6,000	-	6,000	8,459	8,459	-	-	-	-	8,459	-	8,459	-	7,583	876
12	도로	중로2-144	L=418m	부분집행	00.03.04.	6,454	5,176	1,278	187	187	-	-	-	-	187	-	187	-	-	187
13	도로	중로2-145	L=238m	부분집행	00.03.04.	3,570	2,860	710	107	107	-	-	-	-	107	-	107	-	3	104
14	도로	중로2-173	L=4,527m	부분집행	00.03.10.	67,905	16,464	51,441	10,059	10,059	-	-	-	-	10,059	-	10,059	-	2,549	7,510
15	도로	중로2-349	L=177m	미집행	07.09.20.	3,630	-	3,630	851	851	-	-	-	-	851	-	851	-	321	530
16	도로	중로2-468	L=34m	미집행	11.01.27.	510	-	510	1,109	1,109	-	-	-	-	1,109	-	1,109	-	1,035	74
17	도로	중로3-73	L=957m	부분집행	98.05.11.	12,192	10,519	1,673	3,730	3,730	-	-	-	-	3,730	-	3,730	1,466	2,264	-
18	도로	중로3-83	L=320m	미집행	00.03.04.	3,840	-	3,840	5,243	5,243	-	-	-	-	5,243	-	5,243	-	4,682	561
19	도로	중로3-84	L=316m	부분집행	00.03.04.	3,792	930	2,862	9,634	9,634	-	-	-	-	9,634	-	9,634	4,608	5,026	-
20	도로	중로3-89	L=96m	미집행	00.03.04.	1,152	-	1,152	3,174	3,174	-	-	-	-	3,174	-	3,174	-	3,006	168
21	도로	중로3-98	L=1,238m	부분집행	98.05.11.	14,856	4,501	10,355	5,325	5,325	-	-	-	-	5,325	-	5,325	-	3,813	1,512
22	도로	중로3-151	L=253m	미집행	00.03.10.	3,036	-	3,036	5,977	5,977	-	-	-	-	5,977	-	5,977	-	5,534	443
23	도로	중로3-152	L=110m	미집행	00.03.10.	1,320	-	1,320	2,841	2,841	-	-	-	-	2,841	-	2,841	-	2,648	193
24	도로	중로3-153	L=138m	미집행	00.03.10.	1,656	-	1,656	3,200	3,200	-	-	-	-	3,200	-	3,200	-	2,958	242
25	도로	중로3-154	L=150m	미집행	00.03.10.	1,800	-	1,800	3,533	3,533	-	-	-	-	3,533	-	3,533	-	3,270	263
26	도로	중로3-171	L=160m	부분집행	00.03.10.	1,675	1,506	169	217	217	-	-	-	-	217	-	217	-	192	25
27	도로	중로3-262	L=800m	미집행	07.11.29	9,600	-	9,600	2,438	2,438	-	-	-	-	2,438	-	2,438	-	1,036	1,402
28	도로	소로1-1	L=261m	미집행	90.12.06.	2,610	-	2,610	3,736	3,736	-	-	-	-	3,736	-	3,736	-	3,355	381
29	도로	소로1-3	L=186m	미집행	90.12.06.	1,860	-	1,860	2,384	2,384	-	-	-	-	2,384	-	2,384	-	2,112	272
30	도로	소로1-4	L=86m	미집행	00.03.04.	860	-	860	624	624	-	-	-	-	624	-	624	-	498	126
31	도로	소로1-6	L=158m	미집행	90.12.06.	1,580	-	1,580	2,878	2,878	-	-	-	-	2,878	-	2,878	-	2,647	231
32	도로	소로1-7	L=350m	미집행	00.03.04.	3,500	-	3,500	4,162	4,162	-	-	-	-	4,162	-	4,162	-	3,651	511
33	도로	소로1-8	L=1,070m	부분집행	00.03.10.	11,102	7,303	3,799	3,579	3,579	-	-	-	-	3,579	-	3,579	-	3,024	555
34	도로	소로1-9	L=104m	미집행	90.12.06.	1,040	-	1,040	1,788	1,788	-	-	-	-	1,788	-	1,788	-	1,636	152
35	도로	소로1-10	L=722m	부분집행	90.12.06.	7,340	4,491	2,849	3,044	3,044	-	-	-	-	3,044	-	3,044	-	2,628	416
36	도로	소로1-11	L=270m	부분집행	90.12.06.	2,700	1,350	1,350	1,818	1,818	-	-	-	-	1,818	-	1,818	-	1,621	197
37	도로	소로1-13	L=128m	미집행	00.03.10.	1,280	-	1,280	143	143	-	-	-	-	143	-	143	143	-	-
38	도로	소로1-17	L=360m	미집행	00.03.10.	3,600	-	3,600	7,803	7,803	-	-	-	-	7,803	-	7,803	-	7,277	526
39	도로	소로1-18	L=118m	미집행	00.03.04.	1,180	-	1,180	2,874	2,874	-	-	-	-	2,874	-	2,874	-	2,702	172
40	도로	소로1-19	L=489m	미집행	00.03.04.	4,890	-	4,890	11,434	11,434	-	-	-	-	11,434	-	11,434	-	10,720	714
41	도로	소로1-20	L=40m	미집행	00.03.04.	400	-	400	836	836	-	-	-	-	836	-	836	-	778	58
42	도로	소로1-21	L=80m	미집행	00.03.04.	800	-	800	2,186	2,186	-	-	-	-	2,186	-	2,186	-	2,069	117
43	도로	소로1-22	L=210m	미집행	00.03.04.	2,100	-	2,100	6,818	6,818	-	-	-	-	6,818	-	6,818	-	6,511	307
44	도로	소로1-23	L=245m	미집행	00.03.04.	2,450	-	2,450	5,178	5,178	-	-	-	-	5,178	-	5,178	-	4,820	358
45	도로	소로1-24	L=85m	미집행	00.03.04.	850	-	850	501	501	-	-	-	-	501	-	501	-	377	124
46	도로	소로1-25	L=90m	미집행	00.03.04.	900	-	900	2,747	2,747	-	-	-	-	2,747	-	2,747	-	2,616	131
47	도로	소로1-26	L=114m	미집행	00.03.04.	1,140	-	1,140	1,104	1,104	-	-	-	-	1,104	-	1,104	-	938	166
48	도로	소로1-28	L=67m	미집행	00.03.10.	709	-	709	1,836	1,836	-	-	-	-	1,836	-	1,836	-	1,732	104
49	도로	소로1-29	L=77m	미집행	00.03.10.	770	-	770	2,322	2,322	-	-	-	-	2,322	-	2,322	-	2,210	112
50	도로	소로1-34	L=188m	미집행	07.11.29	1,880	-	1,880	550	550	-	-	-	-	550	-	550	-	276	274
51	도로	소로1-35	L=230m	미집행	07.11.29	2,300	-	2,300	2,708	2,708	-	-	-	-	2,708	-	2,708	-	2,372	336
52	도로	소로1-40	L=482m	부분집행	00.03.10.	4,844	4,308	536	605	605	-	-	-	-	605	-	605	-	527	78
53	도로	소로1-41	L=368m	미집행	00.03.10.	3,680	-	3,680	2,855	2,855	-	-	-	-	2,855	-	2,855	-	2,318	537
54	도로	소로1-42	L=40m	미집행	00.03.10.	400	-	400	98	98	-	-	-	-	98	-	98	-	40	58
55	도로	소로1-43	L=79m	미집행	00.03.10.	790	-	790	503	503	-	-	-	-	503	-	503	-	388	115
56	도로	소로1-45	L=40m	부분집행	00.03.10.	451	321	130	19	19	-	-	-	-	19	-	19	-	-	19
57	도로	소로1-54	L=819m	부분집행	00.03.10.	8,190	3,617	4,573	1,179	1,179	-	-	-	-	1,179	-	1,179	-	511	668
58	도로	소로1-58	L=269m	미집행	02.03.02.	2,690	-	2,690	2,918	2,918	-	-	-	-	2,918	-	2,918	-	2,525	393
59	도로	소로1-69	L=638m	부분집행	09.08.13.	6,380	3,809	2,571	406	406	-	-	-	-	406	-	406	406	-	-
60	도로	소로1-105	L=1,737m	미집행	14.08.07.	17,370	-	17,370	2,742	2,742	-	-	-	-	2,742	-	2,742	2742	-	-
61	도로	소로2-1	L=270m	미집행	90.12.06.	2,160	-	2,160	1,341	1,341	-	-	-	-	1,341	-	1,341	-	1,026	315
62	도로	소로2-2	L=135m	미집행	90.12.06.	1,080	-	1,080	1,416	1,416	-	-	-	-	1,416	-	1,416	-	1,258	158
63	도로	소로2-3	L=131m	미집행	90.12.06.	1,048	-	1,048	1,747	1,747	-	-	-	-	1,747	-	1,747	-	1,594	153
64	도로	소로2-6	L=254m	미집행	90.12.06.	2,032	-	2,032	1,695	1,695	-	-	-	-	1,695	-	1,695	-	1,398	297
65	도로	소로2-7	L=198m	미집행	90.12.06.	1,584	-	1,584	635	635	-	-	-	-	635	-	635	-	404	231
66	도로	소로2-8	L=43m	미집행	90.12.06.	344	-	344	266	266	-	-	-	-	266	-	266	-	216	50
67	도로	소로2-9	L=240m	미집행	90.12.06.	1,920	-	1,920	1,886	1,886	-	-	-	-	1,886	-	1,886	-	1,606	280
68	도로	소로2-11	L=241m	미집행	90.12.06.	1,928	-	1,928	1,639	1,639	-	-	-	-	1,639	-	1,639	-	1,358	281
69	도로	소로2-12	L=137m	미집행	90.12.06.	1,096	-	1,096	920	920	-	-	-	-	920	-	920	-	760	160
70	도로	소로2-13	L=863m	미집행	00.03.04.	6,904	-	6,904	5,742	5,742	-	-	-	-	5,742	-	5,742	-	4,734	1,008
71	도로	소로2-14	L=243m	미집행	12.02.16.	1,944	-	1,944	287	287	-	-	-	-	287	-	287	-	3	284
72	도로	소로2-15	L=90m	미집행	90.12.06.	720	-	720	390	390	-	-	-	-	390	-	390	-	285	105
73	도로	소로2-16	L=201m	미집행	90.12.06.	1,608	-	1,608	1,352	1,352	-	-	-	-	1,352	-	1,352	-	1,117	235
74	도로	소로2-17	L=35m	미집행	00.03.04.	280	-	280	156	156	-	-	-	-	156	-	156	-	115	41
75	도로	소로2-18	L=80m	미집행	90.12.06.	640	-	640	772	772	-	-	-	-	772	-	772	-	679	93
76	도로	소로2-19	L=121m	미집행	90.12.06.	968	-	968	1,392	1,392	-	-	-	-	1,392	-	1,392	-	1,251	141
77	도로	소로2-20	L=225m	미집행	00.03.04.	1,800	-	1,800	1,258	1,258	-	-	-	-	1,258	-	1,258	-	995	263
78	도로	소로2-21	L=412m	미집행	05.03.24.	3,296	-	3,296	2,089	2,089	-	-	-	-	2,089	-	2,089	-	1,608	481
79	도로	소로2-22	L=52m	미집행	05.03.24.	416	-	416	275	275	-	-	-	-	275	-	275	-	214	61
80	도로	소로2-23	L=324m	미집행	05.03.24.	2,592	-	2,592	1,827	1,827	-	-	-	-	1,827	-	1,827	-	1,449	378
81	도로	소로2-24	L=310m	미집행	05.03.24.	2,480	-	2,480	1,349	1,349	-	-	-	-	1,349	-	1,349	-	987	362
82	도로	소로2-25	L=104m	미집행	90.12.06.	832	-	832	1,505	1,505	-	-	-	-	1,505	-	1,505	-	1,384	121
83	도로	소로2-26	L=104m	미집행	90.12.06.	832	-	832	877	877	-	-	-	-	877	-	877	-	756	121
84	도로	소로2-27	L=104m	미집행	90.12.06.	832	-	832	364	364	-	-	-	-	364	-	364	364	-	-
85	도로	소로2-29	L=118m	미집행	90.12.06.	944	-	944	1,310	1,310	-	-	-	-	1,310	-	1,310	-	1,172	138
86	도로	소로2-30	L=440m	미집행	05.03.24.	3,520	-	3,520	1,364	1,364	-	-	-	-	1,364	-	1,364	-	850	514
87	도로	소로2-31	L=115m	미집행	90.12.06.	920	-	920	749	749	-	-	-	-	749	-	749	-	615	134
88	도로	소로2-32	L=179m	미집행	05.03.24.	1,432	-	1,432	638	638	-	-	-	-	638	-	638	-	429	209
89	도로	소로2-33	L=267m	미집행	90.12.06.	2,136	-	2,136	2,908	2,908	-	-	-	-	2,908	-	2,908	-	2,596	312
90	도로	소로2-34	L=174m	미집행	05.03.24.	1,392	-	1,392	1,058	1,058	-	-	-	-	1,058	-	1,058	-	855	203
91	도로	소로2-36	L=146m	미집행	05.03.24.	1,168	-	1,168	1,018	1,018	-	-	-	-	1,018	-	1,018	-	847	171
92	도로	소로2-40	L=122m	미집행	07.11.29	976	-	976	882	882	-	-	-	-	882	-	882	-	740	142
93	도로	소로2-41	L=130m	미집행	90.12.06.	1,040	-	1,040	1,278	1,278	-	-	-	-	1,278	-	1,278	-	1,126	152
94	도로	소로2-42	L=259m	부분집행	90.12.06.	2,111	1,347	764	2,761	2,761	-	-	-	-	2,761	-	2,761	-	2,649	112
95	도로	소로2-43	L=296m	부분집행	90.12.06.	2,367	1,082	1,285	1,662	1,662	-	-	-	-	1,662	-	1,662	-	1,474	188
96	도로	소로2-46	L=104m	미집행	05.03.24.	832	-	832	1,045	1,045	-	-	-	-	1,045	-	1,045	-	924	121
97	도로	소로2-47	L=194m	미집행	05.03.24.	1,552	-	1,552	1,058	1,058	-	-	-	-	1,058	-	1,058	-	831	227
98	도로	소로2-48	L=182m	미집행	05.03.24.	1,456	-	1,456	665	665	-	-	-	-	665	-	665	-	452	213
99	도로	소로2-50	L=30m	부분집행	90.12.06.	240	-	240	1,195	1,195	-	-	-	-	1,195	-	1,195	-	1,160	35
100	도로	소로2-51	L=67m	미집행	05.03.24.	536	-	536	89	89	-	-	-	-	89	-	89	-	11	78
101	도로	소로2-52	L=47m	미집행	05.03.24.	376	-	376	74	74	-	-	-	-	74	-	74	-	19	55
102	도로	소로2-54	L=235m	미집행	90.12.06.	1,880	-	1,880	2,001	2,001	-	-	-	-	2,001	-	2,001	-	1,727	274
103	도로	소로2-56	L=356m	부분집행	90.12.06.	2,848	2,274	574	1,164	1,164	-	-	-	-	1,164	-	1,164	-	1,080	84
104	도로	소로2-57	L=156m	미집행	90.12.06.	1,248	-	1,248	1,840	1,840	-	-	-	-	1,840	-	1,840	-	1,658	182
105	도로	소로2-58	L=180m	부분집행	90.12.06.	1,440	1,005	435	540	540	-	-	-	-	540	-	540	-	476	64
106	도로	소로2-59	L=230m	미집행	90.12.06.	1,840	-	1,840	2,199	2,199	-	-	-	-	2,199	-	2,199	-	1,930	269
107	도로	소로2-60	L=314m	미집행	90.12.06.	2,512	-	2,512	3,847	3,847	-	-	-	-	3,847	-	3,847	-	3,480	367
108	도로	소로2-61	L=98m	미집행	90.12.06.	784	-	784	1,178	1,178	-	-	-	-	1,178	-	1,178	-	1,064	114
109	도로	소로2-62	L=145m	미집행	90.12.06.	1,160	-	1,160	2,463	2,463	-	-	-	-	2,463	-	2,463	-	2,294	169
110	도로	소로2-63	L=96m	미집행	90.12.06.	768	-	768	1,488	1,488	-	-	-	-	1,488	-	1,488	-	1,376	112
111	도로	소로2-64	L=99m	미집행	90.12.06.	792	-	792	1,848	1,848	-	-	-	-	1,848	-	1,848	-	1,732	116
112	도로	소로2-65	L=154m	미집행	90.12.06.	1,232	-	1,232	1,508	1,508	-	-	-	-	1,508	-	1,508	-	1,328	180
113	도로	소로2-66	L=350m	부분집행	90.12.06.	2,800	633	2,167	3,862	3,862	-	-	-	-	3,862	-	3,862	-	3,546	316
114	도로	소로2-67	L=500m	미집행	90.12.06.	4,000	-	4,000	3,185	3,185	-	-	-	-	3,185	-	3,185	-	2,601	584
115	도로	소로2-69	L=110m	미집행	90.12.06.	880	-	880	1,195	1,195	-	-	-	-	1,195	-	1,195	-	1,067	128
116	도로	소로2-72	L=200m	미집행	90.12.06.	1,600	-	1,600	1,874	1,874	-	-	-	-	1,874	-	1,874	-	1,640	234
117	도로	소로2-75	L=285m	부분집행	90.12.06.	2,328	1,678	650	458	458	-	-	-	-	458	-	458	-	363	95
118	도로	소로2-80	L=495m	부분집행	90.12.06.	4,066	3,681	385	331	331	-	-	-	-	331	-	331	-	275	56
119	도로	소로2-84	L=192m	부분집행	90.12.06.	1,536	835	701	1,700	1,700	-	-	-	-	1,700	-	1,700	1500	200	-
120	도로	소로2-86	L=113m	미집행	90.12.06.	904	-	904	1,600	1,600	-	-	-	-	1,600	-	1,600	1400	200	-
121	도로	소로2-87	L=246m	미집행	90.12.06.	1,968	-	1,968	3,399	3,399	-	-	-	-	3,399	-	3,399	-	3,112	287
122	도로	소로2-88	L=90m	미집행	90.12.06.	720	-	720	356	356	-	-	-	-	356	-	356	256	100	-
123	도로	소로2-89	L=252m	미집행	90.12.06.	2,016	-	2,016	4,172	4,172	-	-	-	-	4,172	-	4,172	-	3,878	294
124	도로	소로2-90	L=390m	미집행	90.12.06.	3,120	-	3,120	1,500	1,500	-	-	-	-	1,500	-	1,500	1300	200	-
125	도로	소로2-91	L=460m	부분집행	90.12.06.	3,698	784	2,914	1,797	1,797	-	-	-	-	1,797	-	1,797	-	1,372	425
126	도로	소로2-92	L=130m	미집행	90.12.06.	1,040	-	1,040	1,110	1,110	-	-	-	-	1,110	-	1,110	-	958	152
127	도로	소로2-93	L=50m	미집행	90.12.06.	400	-	400	587	587	-	-	-	-	587	-	587	-	529	58
128	도로	소로2-95	L=125m	미집행	90.12.06.	1,000	-	1,000	1,328	1,328	-	-	-	-	1,328	-	1,328	-	1,182	146
129	도로	소로2-96	L=330m	부분집행	90.12.06.	2,640	943	1,697	4,000	4,000	-	-	-	-	4,000	-	4,000	2500	1500	-
130	도로	소로2-97	L=250m	부분집행	90.12.06.	2,000	943	1,057	2,249	2,249	-	-	-	-	2,249	-	2,249	-	2,095	154
131	도로	소로2-104	L=96m	미집행	00.03.04.	768	-	768	1,021	1,021	-	-	-	-	1,021	-	1,021	-	909	112
132	도로	소로2-107	L=96m	미집행	00.03.04.	768	-	768	1,233	1,233	-	-	-	-	1,233	-	1,233	-	1,121	112
133	도로	소로2-109	L=209m	미집행	00.03.04.	1,672	-	1,672	2,587	2,587	-	-	-	-	2,587	-	2,587	-	2,343	244
134	도로	소로2-110	L=120m	미집행	00.03.04.	960	-	960	936	936	-	-	-	-	936	-	936	-	796	140
135	도로	소로2-111	L=120m	미집행	00.03.04.	960	-	960	664	664	-	-	-	-	664	-	664	-	524	140
136	도로	소로2-112	L=120m	미집행	00.03.04.	960	-	960	1,570	1,570	-	-	-	-	1,570	-	1,570	-	1,430	140
137	도로	소로2-113	L=120m	미집행	00.03.04.	960	-	960	1,506	1,506	-	-	-	-	1,506	-	1,506	-	1,366	140
138	도로	소로2-114	L=248m	미집행	00.03.04.	1,984	-	1,984	518	518	-	-	-	-	518	-	518	-	228	290
139	도로	소로2-131	L=230m	미집행	90.12.06.	1,840	-	1,840	2,271	2,271	-	-	-	-	2,271	-	2,271	-	2,002	269
140	도로	소로2-133	L=80m	미집행	90.12.06.	640	-	640	1,511	1,511	-	-	-	-	1,511	-	1,511	-	1,418	93
141	도로	소로2-136	L=625m	부분집행	90.12.06.	5,000	2,560	2,440	3,683	3,683	-	1,500	-	-	2,183	-	3,683	3000	683	-
142	도로	소로2-137	L=196m	미집행	90.12.06.	1,568	-	1,568	1,732	1,732	-	-	-	-	1,732	-	1,732	-	1,503	229
143	도로	소로2-139	L=132m	미집행	90.12.06.	1,056	-	1,056	1,304	1,304	-	-	-	-	1,304	-	1,304	-	1,150	154
144	도로	소로2-140	L=229m	미집행	90.12.06.	1,832	-	1,832	2,202	2,202	-	-	-	-	2,202	-	2,202	-	1,935	267
145	도로	소로2-141	L=413m	미집행	90.12.06.	3,304	-	3,304	3,966	3,966	-	-	-	-	3,966	-	3,966	-	3,484	482
146	도로	소로2-142	L=581m	부분집행	90.12.06.	4,648	1,724	2,924	1,531	1,531	-	-	-	-	1,531	-	1,531	-	1,104	427
147	도로	소로2-143	L=354m	미집행	90.12.06.	2,832	-	2,832	3,279	3,279	-	-	-	-	3,279	-	3,279	-	2,866	413
148	도로	소로2-144	L=126m	미집행	90.12.06.	1,008	-	1,008	1,295	1,295	-	-	-	-	1,295	-	1,295	-	1,148	147
149	도로	소로2-146	L=300m	미집행	90.12.06.	2,400	-	2,400	1,433	1,433	-	-	-	-	1,433	-	1,433	-	1,083	350
150	도로	소로2-147	L=78m	미집행	90.12.06.	624	-	624	1,401	1,401	-	-	-	-	1,401	-	1,401	-	1,310	91
151	도로	소로2-148	L=30m	미집행	90.12.06.	240	-	240	105	105	-	-	-	-	105	-	105	-	70	35
152	도로	소로2-149	L=320m	미집행	90.12.06.	2,560	-	2,560	638	638	-	-	-	-	638	-	638	-	273	365
153	도로	소로2-151	L=102m	미집행	90.12.06.	816	-	816	1,900	1,900	-	1,000	-	-	900	-	1,900	1700	200	-
154	도로	소로2-153	L=40m	미집행	90.12.06.	320	-	320	356	356	-	-	-	-	356	-	356	-	309	47
155	도로	소로2-157	L=319m	부분집행	90.12.06.	2,506	1,614	892	1,311	1,311	-	-	-	-	1,311	-	1,311	-	1,181	130
156	도로	소로2-160	L=438m	미집행	90.12.06.	3,504	-	3,504	4,123	4,123	-	-	-	-	4,123	-	4,123	-	3,611	512
157	도로	소로2-161	L=146m	미집행	90.12.06.	1,168	-	1,168	1,552	1,552	-	-	-	-	1,552	-	1,552	-	1,381	171
158	도로	소로2-162	L=418m	부분집행	90.12.06.	3,161	935	2,226	2,769	2,769	-	-	-	-	2,769	-	2,769	-	2,444	325
159	도로	소로2-163	L=464m	부분집행	90.12.06.	3,726	1,716	2,010	2,500	2,500	-	-	-	-	2,500	-	2,500	-	2,207	293
160	도로	소로2-165	L=75m	미집행	90.12.06.	638	304	334	594	594	-	-	-	-	594	-	594	-	545	49
161	도로	소로2-166	L=56m	미집행	90.12.06.	448	-	448	711	711	-	-	-	-	711	-	711	-	646	65
162	도로	소로2-169	L=408m	부분집행	90.12.06.	3,190	1,806	1,384	1,831	1,831	-	-	-	-	1,831	-	1,831	-	1,629	202
163	도로	소로2-176	L=238m	부분집행	00.03.10.	2,019	1,807	212	736	736	-	-	-	-	736	-	736	-	705	31
164	도로	소로2-177	L=168m	부분집행	00.03.10.	1,344	940	404	1,664	1,664	-	-	-	-	1,664	-	1,664	-	1,605	59
165	도로	소로2-181	L=525m	미집행	90.12.06.	4,200	-	4,200	7,267	7,267	-	-	-	-	7,267	-	7,267	-	6,654	613
166	도로	소로2-182	L=522m	미집행	90.12.06.	4,176	-	4,176	4,131	4,131	-	-	-	-	4,131	-	4,131	-	3,521	610
167	도로	소로2-183	L=116m	미집행	90.12.06.	928	-	928	1,834	1,834	-	-	-	-	1,834	-	1,834	-	1,699	135
168	도로	소로2-184	L=116m	미집행	90.12.06.	928	-	928	1,510	1,510	-	-	-	-	1,510	-	1,510	-	1,375	135
169	도로	소로2-185	L=118m	미집행	90.12.06.	944	-	944	1,030	1,030	-	-	-	-	1,030	-	1,030	-	892	138
170	도로	소로2-186	L=118m	미집행	90.12.06.	944	-	944	681	681	-	-	-	-	681	-	681	-	543	138
171	도로	소로2-188	L=66m	미집행	90.12.06.	528	-	528	930	930	-	-	-	-	930	-	930	-	853	77
172	도로	소로2-189	L=118m	미집행	90.12.06.	944	-	944	1,624	1,624	-	-	-	-	1,624	-	1,624	-	1,486	138
173	도로	소로2-190	L=200m	부분집행	90.12.06.	1,600	313	1,287	1,458	1,458	-	-	-	-	1,458	-	1,458	-	1,270	188
174	도로	소로2-191	L=114m	미집행	90.12.06.	912	-	912	1,427	1,427	-	-	-	-	1,427	-	1,427	-	1,294	133
175	도로	소로2-192	L=510m	미집행	00.03.04.	4,080	-	4,080	8,781	8,781	-	-	-	-	8,781	-	8,781	-	8,185	596
176	도로	소로2-197	L=81m	미집행	05.03.24.	648	-	648	142	142	-	-	-	-	142	-	142	-	47	95
177	도로	소로2-200	L=90m	미집행	00.03.10.	720	-	720	1,131	1,131	-	-	-	-	1,131	-	1,131	-	1,026	105
178	도로	소로2-206	L=36m	미집행	00.03.10.	288	-	288	625	625	-	-	-	-	625	-	625	-	583	42
179	도로	소로2-230	L=157m	미집행	00.03.04.	1,256	-	1,256	1,970	1,970	-	-	-	-	1,970	-	1,970	-	1,787	183
180	도로	소로2-272	L=679m	미집행	00.03.10.	5,432	-	5,432	3,670	3,670	-	-	-	-	3,670	-	3,670	-	2,877	793
181	도로	소로2-273	L=230m	미집행	00.03.10.	1,840	-	1,840	2,408	2,408	-	-	-	-	2,408	-	2,408	-	2,139	269
182	도로	소로2-274	L=239m	미집행	00.03.10.	1,912	-	1,912	1,278	1,278	-	-	-	-	1,278	-	1,278	-	999	279
183	도로	소로2-275	L=177m	미집행	00.03.10.	1,416	-	1,416	1,359	1,359	-	-	-	-	1,359	-	1,359	-	1,152	207
184	도로	소로2-276	L=230m	미집행	00.03.10.	1,840	-	1,840	1,151	1,151	-	-	-	-	1,151	-	1,151	-	882	269
185	도로	소로2-277	L=125m	미집행	00.03.10.	1,000	-	1,000	1,233	1,233	-	-	-	-	1,233	-	1,233	-	1,087	146
186	도로	소로2-278	L=250m	미집행	00.03.10.	2,000	-	2,000	918	918	-	-	-	-	918	-	918	-	626	292
187	도로	소로2-279	L=189m	미집행	00.03.10.	1,512	-	1,512	944	944	-	-	-	-	944	-	944	-	723	221
188	도로	소로2-294	L=185m	부분집행	00.03.10.	1,480	880	600	695	695	-	-	-	-	695	-	695	-	607	88
189	도로	소로2-296	L=260m	부분집행	00.03.10.	2,080	1,224	856	125	125	-	-	-	-	125	-	125	-	-	125
190	도로	소로2-298	L=257m	부분집행	00.03.10.	2,056	1,054	1,002	234	234	-	-	-	-	234	-	234	-	86	148
191	도로	소로2-300	L=241m	미집행	00.03.04.	1,928	-	1,928	1,145	1,145	-	-	-	-	1,145	-	1,145	-	864	281
192	도로	소로2-301	L=385m	미집행	00.03.04.	3,080	-	3,080	1,954	1,954	-	-	-	-	1,954	-	1,954	-	1,504	450
193	도로	소로2-302	L=217m	미집행	00.03.04.	1,736	-	1,736	1,503	1,503	-	-	-	-	1,503	-	1,503	-	1,250	253
194	도로	소로2-303	L=340m	미집행	00.03.04.	2,720	-	2,720	2,292	2,292	-	-	-	-	2,292	-	2,292	-	1,895	397
195	도로	소로2-304	L=245m	미집행	00.03.04.	1,960	-	1,960	1,729	1,729	-	-	-	-	1,729	-	1,729	-	1,443	286
196	도로	소로2-305	L=154m	미집행	00.03.04.	1,232	-	1,232	1,028	1,028	-	-	-	-	1,028	-	1,028	-	848	180
197	도로	소로2-306	L=356m	미집행	00.03.04.	2,848	-	2,848	2,847	2,847	-	-	-	-	2,847	-	2,847	-	2,431	416
198	도로	소로2-307	L=40m	미집행	00.03.04.	320	-	320	357	357	-	-	-	-	357	-	357	-	310	47
199	도로	소로2-308	L=40m	미집행	00.03.04.	320	-	320	354	354	-	-	-	-	354	-	354	-	307	47
200	도로	소로2-309	L=94m	미집행	00.03.04.	752	-	752	542	542	-	-	-	-	542	-	542	-	432	110
201	도로	소로2-310	L=122m	미집행	00.03.04.	976	-	976	756	756	-	-	-	-	756	-	756	-	614	142
202	도로	소로2-318	L=175m	미집행	00.03.04.	1,400	-	1,400	1,968	1,968	-	-	-	-	1,968	-	1,968	-	1,764	204
203	도로	소로2-322	L=30m	미집행	02.03.02.	240	-	240	348	348	-	-	-	-	348	-	348	-	313	35
204	도로	소로2-323	L=120m	미집행	02.03.02.	960	-	960	1,354	1,354	-	-	-	-	1,354	-	1,354	-	1,214	140
205	도로	소로2-324	L=284m	미집행	02.03.02.	2,272	-	2,272	1,424	1,424	-	-	-	-	1,424	-	1,424	-	1,092	332
206	도로	소로2-326	L=352m	미집행	05.03.24.	2,816	-	2,816	891	891	-	-	-	-	891	-	891	-	480	411
207	도로	소로2-327	L=286m	미집행	05.03.24.	2,288	-	2,288	697	697	-	-	-	-	697	-	697	-	363	334
208	도로	소로2-341	L=134m	미집행	09.04.09.	1,072	-	1,072	2,622	2,622	-	-	-	-	2,622	-	2,622	-	2,465	157
209	도로	소로2-342	L=249m	미집행	09.04.09.	1,992	-	1,992	3,029	3,029	-	-	-	-	3,029	-	3,029	-	2,738	291
210	도로	소로2-343	L=130m	미집행	09.04.09.	1,040	-	1,040	913	913	-	-	-	-	913	-	913	-	761	152
211	도로	소로2-363	L=145m	미집행	11.08.04.	1,160	-	1,160	169	169	-	-	-	-	169	-	169	-	-	169
212	도로	소로2-364	L=170m	미집행	00.03.04.	1,360	-	1,360	1,226	1,226	-	-	-	-	1,226	-	1,226	-	1,027	199
213	도로	소로2-366	L=336m	미집행	00.03.04.	2,688	-	2,688	3,316	3,316	-	-	-	-	3,316	-	3,316	-	2,924	392
214	도로	소로2-367	L=135m	미집행	00.03.04.	1,080	-	1,080	2,335	2,335	-	-	-	-	2,335	-	2,335	-	2,177	158
215	도로	소로2-368	L=66m	미집행	00.03.04.	528	-	528	897	897	-	-	-	-	897	-	897	-	820	77
216	도로	소로2-369	L=210m	미집행	00.03.04.	1,680	-	1,680	2,559	2,559	-	-	-	-	2,559	-	2,559	-	2,314	245
217	도로	소로2-370	L=135m	미집행	00.03.04.	1,080	-	1,080	1,874	1,874	-	-	-	-	1,874	-	1,874	-	1,716	158
218	도로	소로2-371	L=70m	미집행	00.03.04.	560	-	560	1,013	1,013	-	-	-	-	1,013	-	1,013	-	931	82
219	도로	소로2-372	L=70m	미집행	00.03.04.	560	-	560	753	753	-	-	-	-	753	-	753	-	671	82
220	도로	소로2-373	L=100m	미집행	00.03.04.	800	-	800	2,514	2,514	-	-	-	-	2,514	-	2,514	-	2,397	117
221	도로	소로2-374	L=74m	미집행	00.03.04.	592	-	592	727	727	-	-	-	-	727	-	727	-	641	86
222	도로	소로2-375	L=110m	미집행	00.03.10.	880	-	880	1,192	1,192	-	-	-	-	1,192	-	1,192	-	1,064	128
223	도로	소로2-376	L=63m	미집행	00.03.10.	504	-	504	648	648	-	-	-	-	648	-	648	-	574	74
224	도로	소로2-377	L=206m	미집행	00.03.04.	1,648	-	1,648	1,759	1,759	-	-	-	-	1,759	-	1,759	-	1,518	241
225	도로	소로2-378	L=102m	미집행	00.03.10.	816	-	816	666	666	-	-	-	-	666	-	666	-	547	119
226	도로	소로2-379	L=145m	미집행	00.03.04.	1,160	-	1,160	1,322	1,322	-	-	-	-	1,322	-	1,322	-	1,153	169
227	도로	소로2-380	L=40m	미집행	00.03.04.	320	-	320	452	452	-	-	-	-	452	-	452	-	405	47
228	도로	소로2-381	L=360m	미집행	00.03.04.	2,880	-	2,880	2,962	2,962	-	-	-	-	2,962	-	2,962	-	2,542	420
229	도로	소로2-382	L=110m	미집행	00.03.04.	880	-	880	1,142	1,142	-	-	-	-	1,142	-	1,142	-	1,014	128
230	도로	소로2-383	L=47m	미집행	02.03.02.	376	-	376	157	157	-	-	-	-	157	-	157	-	102	55
231	도로	소로2-384	L=241m	미집행	05.03.24.	1,928	-	1,928	1,744	1,744	-	-	-	-	1,744	-	1,744	-	1,463	281
232	도로	소로2-385	L=52m	미집행	05.03.24.	416	-	416	479	479	-	-	-	-	479	-	479	-	418	61
233	도로	소로2-386	L=102m	부분집행	05.03.24.	816	368	448	584	584	-	-	-	-	584	-	584	-	519	65
234	도로	소로2-387	L=306m	부분집행	05.03.24.	2,448	648	1,800	1,480	1,480	-	-	-	-	1,480	-	1,480	-	1,217	263
235	도로	소로2-388	L=46m	미집행	05.03.24.	368	-	368	454	454	-	-	-	-	454	-	454	-	400	54
236	도로	소로2-389	L=164m	미집행	05.03.24.	1,312	-	1,312	850	850	-	-	-	-	850	-	850	-	658	192
237	도로	소로2-390	L=196m	미집행	05.03.24.	1,568	-	1,568	1,043	1,043	-	-	-	-	1,043	-	1,043	-	814	229
238	도로	소로2-505	L=325m	부분집행	98.05.11.	2,798	1,823	975	1,554	1,554	-	-	-	-	1,554	-	1,554	-	1,412	142
239	도로	소로2-591	L=427m	부분집행	76.04.09.	3,416	1,951	1,465	214	214	-	-	-	-	214	-	214	-	-	214
240	도로	소로2-592	L=740m	부분집행	87.07.25.	5,872	3,525	2,347	3,210	3,210	-	-	-	-	3,210	-	3,210	-	2,867	343
241	도로	소로2-593	L=313m	부분집행	87.07.25.	2,639	921	1,718	1,757	1,757	-	-	-	-	1,757	-	1,757	1500	257	-
242	도로	소로2-596	L=545m	부분집행	76.04.09.	4,203	2,109	2,094	2,695	2,695	-	-	-	-	2,695	-	2,695	-	2,389	306
243	도로	소로2-603	L=134m	미집행	87년이전	1,072	-	1,072	283	283	-	-	-	-	283	-	283	-	126	157
244	도로	소로2-610	L=84m	미집행	13.04.04.	672	-	672	98	98	-	-	-	-	98	-	98	-	-	98
245	도로	소로2-637	L=62m	미집행	17.12.28.	496	-	496	72	72	-	-	-	-	72	-	72	-	-	72
246	도로	소로2-641	L=195m	미집행	90.12.06.	1,560	-	1,560	1,342	1,342	-	-	-	-	1,342	-	1,342	-	1,114	228
247	도로	소로2-643	L=57m	부분집행	90.12.06.	605	564	41	51	51	-	-	-	-	51	-	51	-	45	6
248	도로	소로2-644	L=131m	미집행	90.12.06.	1,048	-	1,048	1,886	1,886	-	-	-	-	1,886	-	1,886	-	1,733	153
249	도로	소로2-645	L=34m	미집행	90.12.06.	272	-	272	740	740	-	-	-	-	740	-	740	-	700	40
250	도로	소로2-646	L=74m	미집행	90.12.06.	592	-	592	86	86	-	-	-	-	86	-	86	-	-	86
251	도로	소로2-647	L=103m	미집행	90.12.06.	824	-	824	120	120	-	-	-	-	120	-	120	-	-	120
252	도로	소로2-보1	L=32m	미집행	00.03.04.	256	-	256	373	373	-	-	-	-	373	-	373	-	336	37
253	도로	소로2-보6	L=27m	미집행	00.03.04.	216	-	216	144	144	-	-	-	-	144	-	144	-	112	32
254	도로	소로2-보7	L=27m	미집행	00.03.04.	216	-	216	482	482	-	-	-	-	482	-	482	-	450	32
255	도로	소로3-6	L=1,045m	미집행	03.10.23	6,270	-	6,270	958	958	-	-	-	-	958	-	958	-	43	915
256	도로	소로3-8	L=86m	미집행	05.03.24.	516	-	516	131	131	-	-	-	-	131	-	131	-	56	75
257	도로	소로3-9	L=171m	미집행	05.03.24.	1,026	-	1,026	493	493	-	-	-	-	493	-	493	-	343	150
258	도로	소로3-10	L=116m	미집행	05.03.24.	696	-	696	288	288	-	-	-	-	288	-	288	-	186	102
259	도로	소로3-11	L=296m	미집행	05.03.24.	1,776	-	1,776	867	867	-	-	-	-	867	-	867	-	608	259
260	도로	소로3-12	L=202m	미집행	05.03.24.	1,212	-	1,212	717	717	-	-	-	-	717	-	717	-	540	177
261	도로	소로3-13	L=156m	미집행	05.03.24.	936	-	936	779	779	-	-	-	-	779	-	779	-	642	137
262	도로	소로3-14	L=168m	부분집행	05.03.24.	1,008	648	360	100	100	-	-	-	-	100	-	100	-	47	53
263	도로	소로3-16	L=172m	미집행	05.03.24.	1,032	-	1,032	593	593	-	-	-	-	593	-	593	-	442	151
264	도로	소로3-17	L=224m	미집행	05.03.24.	1,344	-	1,344	546	546	-	-	-	-	546	-	546	-	350	196
265	도로	소로3-18	L=96m	미집행	05.03.24.	576	-	576	315	315	-	-	-	-	315	-	315	-	231	84
266	도로	소로3-19	L=260m	미집행	05.03.24.	1,560	-	1,560	849	849	-	-	-	-	849	-	849	-	621	228
267	도로	소로3-22	L=505m	미집행	05.03.24.	4,523	-	4,523	124	124	-	-	-	-	124	-	124	-	124	-
268	도로	소로3-23	L=266m	미집행	05.03.24.	1,596	-	1,596	1,042	1,042	-	-	-	-	1,042	-	1,042	-	809	233
269	도로	소로3-24	L=106m	미집행	05.03.24.	636	-	636	103	103	-	-	-	-	103	-	103	-	10	93
270	도로	소로3-26	L=165m	미집행	05.03.24.	990	-	990	274	274	-	-	-	-	274	-	274	-	129	145
271	도로	소로3-42	L=530m	부분집행	00.03.04.	2,934	2,181	753	1,319	1,319	-	-	-	-	1,319	-	1,319	-	1,209	110
272	도로	소로3-45	L=156m	미집행	05.03.24.	936	-	936	679	679	-	-	-	-	679	-	679	-	542	137
273	도로	소로3-46	L=156m	미집행	05.03.24.	936	-	936	75	75	-	-	-	-	75	-	75	-	75	-
274	도로	소로3-47	L=148m	미집행	05.03.24.	888	-	888	256	256	-	-	-	-	256	-	256	-	126	130
275	도로	소로3-48	L=128m	미집행	05.03.24.	768	-	768	306	306	-	-	-	-	306	-	306	-	194	112
276	도로	소로3-49	L=70m	미집행	05.03.24.	420	-	420	187	187	-	-	-	-	187	-	187	-	126	61
277	도로	소로3-51	L=272m	미집행	05.03.24.	1,632	-	1,632	295	295	-	-	-	-	295	-	295	-	57	238
278	도로	소로3-52	L=108m	미집행	05.03.24.	648	-	648	642	642	-	-	-	-	642	-	642	-	547	95
279	도로	소로3-54	L=66m	미집행	05.03.24.	396	-	396	672	672	-	-	-	-	672	-	672	-	614	58
280	도로	소로3-55	L=58m	미집행	05.03.24.	348	-	348	93	93	-	-	-	-	93	-	93	-	42	51
281	도로	소로3-56	L=152m	미집행	05.03.24.	912	-	912	852	852	-	-	-	-	852	-	852	-	719	133
282	도로	소로3-57	L=372m	미집행	05.03.24.	2,232	-	2,232	934	934	-	-	-	-	934	-	934	-	608	326
283	도로	소로3-58	L=222m	미집행	05.03.24.	1,332	-	1,332	1,314	1,314	-	-	-	-	1,314	-	1,314	-	1,120	194
284	도로	소로3-136	L=28m	미집행	07.11.29	213	-	213	40	40	-	-	-	-	40	-	40	-	9	31
285	도로	소로3-157	L=86m	미집행	98.05.11.	516	-	516	989	989	-	-	-	-	989	-	989	-	914	75
286	도로	소로3-158	L=32m	미집행	98.05.11.	192	-	192	370	370	-	-	-	-	370	-	370	-	342	28
287	도로	소로3-167	L=42m	미집행	98.05.11.	252	-	252	511	511	-	-	-	-	511	-	511	-	474	37
288	도로	소로3-170	L=90m	미집행	98.05.11.	540	-	540	310	310	-	-	-	-	310	-	310	-	231	79
289	도로	소로3-176	L=272m	미집행	05.03.24.	1,632	-	1,632	859	859	-	-	-	-	859	-	859	-	621	238
290	도로	소로3-177	L=96m	미집행	05.03.24.	576	-	576	249	249	-	-	-	-	249	-	249	-	165	84
291	도로	소로3-178	L=184m	미집행	05.03.24.	1,104	-	1,104	1,177	1,177	-	-	-	-	1,177	-	1,177	-	1,016	161
292	도로	소로3-181	L=136m	미집행	05.03.24.	816	-	816	660	660	-	-	-	-	660	-	660	-	541	119
293	도로	소로3-182	L=72m	미집행	05.03.24.	432	-	432	449	449	-	-	-	-	449	-	449	-	386	63
294	도로	소로3-183	L=130m	미집행	05.03.24.	780	-	780	506	506	-	-	-	-	506	-	506	-	392	114
295	도로	소로3-184	L=254m	미집행	05.03.24.	1,524	-	1,524	96	96	-	-	-	-	96	-	96	70	26	-
296	도로	소로3-185	L=56m	미집행	05.03.24.	336	-	336	455	455	-	-	-	-	455	-	455	-	406	49
297	도로	소로3-186	L=152m	미집행	05.03.24.	912	-	912	700	700	-	-	-	-	700	-	700	-	700	-
298	도로	소로3-187	L=238m	미집행	05.03.24.	1,428	-	1,428	90	90	-	-	-	-	90	-	90	50	40	-
299	도로	소로3-188	L=116m	미집행	05.03.24.	696	-	696	414	414	-	-	-	-	414	-	414	-	312	102
300	도로	소로3-189	L=278m	미집행	05.03.24.	1,668	-	1,668	1,197	1,197	-	-	-	-	1,197	-	1,197	-	953	244
301	도로	소로3-190	L=586m	미집행	05.03.24.	3,516	-	3,516	1,718	1,718	-	-	-	-	1,718	-	1,718	-	1,205	513
302	도로	소로3-191	L=166m	미집행	05.03.24.	996	-	996	472	472	-	-	-	-	472	-	472	-	327	145
303	도로	소로3-192	L=82m	미집행	05.03.24.	492	-	492	394	394	-	-	-	-	394	-	394	-	322	72
304	도로	소로3-193	L=102m	미집행	05.03.24.	612	-	612	318	318	-	-	-	-	318	-	318	-	229	89
305	도로	소로3-194	L=153m	미집행	05.03.24.	918	-	918	998	998	-	-	-	-	998	-	998	-	864	134
306	도로	소로3-195	L=42m	미집행	05.03.24.	252	-	252	250	250	-	-	-	-	250	-	250	-	213	37
307	도로	소로3-196	L=85m	미집행	09.11.19	510	-	510	433	433	-	-	-	-	433	-	433	-	359	74
308	도로	소로3-197	L=298m	미집행	05.03.24.	1,788	-	1,788	715	715	-	-	-	-	715	-	715	-	454	261
309	도로	소로3-198	L=74m	미집행	05.03.24.	444	-	444	568	568	-	-	-	-	568	-	568	-	503	65
310	도로	소로3-199	L=206m	미집행	05.03.24.	1,236	-	1,236	1,206	1,206	-	-	-	-	1,206	-	1,206	-	1,026	180
311	도로	소로3-209	L=287m	부분집행	76.04.09.	1,722	1,544	178	465	465	-	-	-	-	465	-	465	-	439	26
312	도로	소로3-212	L=701m	부분집행	94.03.21.	4,206	3,150	1,056	829	829	-	-	-	-	829	-	829	-	675	154
313	도로	소로3-215	L=115m	부분집행	94.03.21.	758	251	507	347	347	-	-	-	-	347	-	347	-	273	74
314	도로	소로3-216	L=87m	미집행	94.03.21.	522	-	522	336	336	-	-	-	-	336	-	336	-	260	76
315	도로	소로3-217	L=127m	부분집행	76.04.09.	762	484	278	412	412	-	-	-	-	412	-	412	-	371	41
316	도로	소로3-222	L=57m	부분집행	76.04.09.	342	251	91	112	112	-	-	-	-	112	-	112	50	62	-
317	도로	소로3-223	L=370m	부분집행	87.7.25.	1,926	1,009	917	1,097	1,097	-	-	-	-	1,097	-	1,097	-	963	134
318	도로	소로3-224	L=90m	부분집행	94.03.21.	540	479	61	62	62	-	-	-	-	62	-	62	55	7	-
319	도로	소로3-225	L=484m	부분집행	94.03.21.	2,904	2,274	630	240	240	-	-	-	-	240	-	240	170	70	-
320	도로	소로3-228	L=248m	부분집행	94.03.21.	1,488	820	668	800	800	-	-	-	-	800	-	800	-	702	98
321	도로	소로3-231	L=412m	미집행	87.07.05.	2,472	-	2,472	3,000	3,000	-	-	-	-	3,000	-	3,000	1600	1400	-
322	도로	소로3-233	L=171m	부분집행	87.07.05.	1,026	234	792	798	798	-	-	-	-	798	-	798	-	682	116
323	도로	소로3-235	L=76m	미집행	87.07.05.	456	-	456	445	445	-	-	-	-	445	-	445	-	378	67
324	도로	소로3-245	L=299m	미집행	12.03.02.	1,794	-	1,794	931	931	-	-	-	-	931	-	931	-	669	262
325	도로	소로3-248	L=122m	미집행	13.04.04.	732	-	732	181	181	-	-	-	-	181	-	181	-	181	-
326	도로	소로3-보1	L=40m	미집행	90.12.6.	160	-	160	374	374	-	-	-	-	374	-	374	-	351	23
327	도로	소로3-보2	L=29m	미집행	00.03.04.	116	-	116	306	306	-	-	-	-	306	-	306	-	289	17
328	도로	소로3-보3	L=34m	미집행	00.03.04.	136	-	136	392	392	-	-	-	-	392	-	392	-	372	20
329	도로	소로3-보4	L=28m	미집행	00.03.04.	112	-	112	530	530	-	-	-	-	530	-	530	-	514	16
330	도로	소로3-보5	L=28m	미집행	00.03.04.	112	-	112	194	194	-	-	-	-	194	-	194	-	178	16
331	도로	소로3-보6	L=32m	미집행	90.12.6.	128	-	128	478	478	-	-	-	-	478	-	478	-	459	19
332	도로	소로3-보7	L=33m	미집행	90.12.6.	132	-	132	252	252	-	-	-	-	252	-	252	-	233	19
333	도로	소로3-보8	L=34m	미집행	00.03.04.	136	-	136	248	248	-	-	-	-	248	-	248	-	228	20

연번	구분	시설명	사업개요	집행구분	최초 결정일	면적(㎡)			총사업비 (백만원)	재원조달계획(백만원)							단계별사업비(백만원)
						합계	집행 면적	미집행 면적		합계	국비	시비	지방채	공기업	구군비	민간	소계	1단계	2-1단계	2-2단계
																		(2020~2022)	(2023~2024)	(2025이후)
334	주차장	주차장-57	L=1,783m	미집행	00.3.10.	1,783	-	1,783	3,490	3,490	-	-	-	-	3,490	-	3,490	-	3,230	260
335	주차장	주차장-84	L=1,143m	미집행	05.03.24.	1,143	-	1,143	758	758	-	-	-	-	758	-	758	-	591	167
336	주차장	주차장-85	L=1,380m	미집행	05.03.24.	1,380	-	1,380	219	219	-	-	-	-	219	-	219	-	18	201
337	주차장	주차장-112	L=1,030m	미집행	08.02.14.	1,030	-	1,030	850	850	-	-	-	-	850	-	850	-	700	150
338	공원	소공원-61	L=3,754m	미집행	05.03.24.	3,754	-	3,754	1,383	1,383	-	-	-	-	1,383	-	1,383	-	835	548
339	공원	어린이공원-230	L=1,500m	부분집행	90.12.15.	1,500	1,462	38	53	53	-	-	-	-	53	-	53	-	47	6
340	공공공지	공공공지-26	L=100m	미집행	05.3.24.	100	-	100	33	33	-	-	-	-	33	-	33	-	18	15
341	수도공급설비	수도공급설비-14	L=10,760m	부분집행	94.03.25.	10,760	10,657	103	18	18	-	18	-	-	-	-	18	-	3	15
342	공공청사	공공청사-38	L=1,000m	미집행	00.03.10.	1,000	-	1,000	2,874	2,874	-	-	-	-	2,874	-	2,874	-	2,728	146
343	학교	학교-140	L=13,147m	부분집행	90.12.15.	13,147	12,768	379	786	786	-	786	-	-	-	-	786	-	731	55
344	학교	학교-141	L=13,970m	부분집행	90.12.15.	13,970	12,686	1,284	1,980	1,980	-	1,980	-	-	-	-	1,980	-	1,793	187
345	학교	학교-151	L=11,900m	부분집행	00.3.10.	11,900	10,508	1,392	1,035	1,035	-	1,035	-	-	-	-	1,035	-	832	203
346	학교	학교-295	L=9,510m	미집행	05.03.03.	9,510	-	9,510	14,400	14,400	-	14,400	-	-	-	-	14,400	-	13,012	1,388
347	사회복지시설	사회복지시설-21	L=2,253m	미집행	19.10.10.	2,253	-	2,253	1,275	1,275	-	-	-	-	1,275	-	1,275	-	946	329
348	청소년수련시설	청소년수련시설-6	L=6,000m	미집행	19.10.10.	6,000	-	6,000	1,766	1,766	-	-	-	-	1,766	-	1,766	-	890	876