정책실명제 중점관리 대상사업 사업내역서

① 정책사업명	호계문화체육센터 건립
② 추진배경	○ 도농복합지역에서 대단위 아파트 신축 등으로 주민들의 문화체육시설 수요가 증가하고 있으나 문화체육시설 부족 ○ 생활체육시설 인프라 확충으로 주민 건강증진과 여가생활 향상을 위하여 문화체육센터 건립 필요
③ 사업개요	○ 사업기간 : ‘13. 1월 ~ ’19. 12월 ○ 위 치 : 북구 창평동 386-1번지 일원 ○ 사업규모 : 부지면적 9,280㎡, 지하1층‧지상2층, 연면적 2,860㎡ ○ 주요시설 : 수영장, 헬스장, 탁구장, 사무실 등 편익시설 ○ 사 업 비 : 14,000백만원(국 3,200 시 5,050 구 5,750)
④ 사업부서	행정지원국 문화체육과		⑤ 담당자	김경륜
⑥ 선정기준	총사업비 10억이상		⑦ 사업기간	‘13. 1. ~ ’19. 12.
<그간 주요 추진내용>
○ 2014. 9월 : 체육센터 조성 관련 농소1동 주민의견 수렴			담당자 장명섭 국장 구일우 담당 안성범 부구청장 이형조 과장 김정열 구청장 박천동
○ 2017. 2월 : 도시관리계획 (문화시설) 결정 ○ 2017. 3월 : 부지 분할 측량 ○ 2017. 5월 : 주민설명회(1차) ○ 2017. 6월 : 주민설명회(2차) 및 토지보상 열람공고			담당자 박한수 국장 곽병주 담당 김형철 부구청장 임상진 과장 김기항 구청장 박천동
○ 2017. 7월 : 설계용역시행 계획 보고 및 토지감정평가․보상 ○ 2017. 8월 : 설계공모 공고 ○ 2017. 9월 : 설계공모 착수 ○ 2017. 11월 : 작품접수 ○ 2017. 12월 : 심사위원회 개최, 당선작 선정, 응모작품전시 ○ 2018. 1월 : 실시설계용역 착수			담당자 이덕봉 국장 최필선 담당 조영진 부구청장 정호동 과장 김기항 구청장 이동권
○ 2019. 5월 : 공사착공(공사기간 14개월) ○ 2020. 8월 : 공사준공(예정)			담당자 김경륜 국장 이문걸 담당 전민성 부구청장 최수미 과장 정미옥 구청장 이동권