사 업 계 획 서

1. 사업의 목적

￭ 본 과업은 국도 7호선(부산∼온성)중 울산광역시 북구 농소동 ∼ 경상북도 경주시 외동읍 구간의 도로가 날로 증가하는 교통량의 급증과 대형화로 교통 혼잡이 극심한 바 이를 해소하고 지역개발 촉진 및 국토의 균형발전을 도모하기 위함.

2. 사업시행지

구 분		위 치	비 고
국도 7호선	시 점	울산광역시 북구 천곡동
	종 점	경상북도 경주시 외동읍 구어리

3. 사업의 종류 및 명칭

￭ 사업의 종류 : 도로건설사업

￭ 노  선   명 : 국도7호선

￭ 도 로 구 분 : 일반도로 보조간선도로 (도시지역, 국도Ⅲ)

￭ 과  업   명 : 울산 농소-경주 외동 국도건설공사

4. 사업시행자의 명칭 및 주소

￭ 주             소 : 부산광역시 동구 초량중로 67

￭ 사업시행자의 명칭 : 부산지방국토관리청

5. 사업의 착수 및 준공예정일

￭ 착  수  일 : 도로구역결정일

￭ 준공예정일 : 2027년 12월 31일

6. 자금조달계획

￭ 자금조달계획 : 국비100 %

(단위 : 원)

구 분	금 액
공 사 비	165,500,000,000
보 상 비	30,500,000,000
합 계	196,000,000,000

7. 시설물 설치계획

￭ 설계속도 : V=80km/h

￭ 과업연장 : L=5.90km

￭ 폭    원 : B=20.0m(양방향 4차로)

￭ 주요구조물 : 교량 8개소/1,463.0m, 터널 1개소/740.0m,, 교차로 3개소(입체교차)

공 종			단 위	수 량	비 고
공 사 연 장			Km	5.90
토 공	흙 깎 기		m3	866,081	자연상태
	흙 쌓 기		m3	988,297	다짐상태
	순쌓기		m3	242,010	자연상태
배 수 공	횡단배수관		개소/m	57개소/1,566.44m
	횡단배수암거		개소/m	6개소/296.7m
	통로암거		개소/m	8개소/358.3m
구 조 물 공	소 교 량(L＜100m)		개소/m	4개소/123m
	장대교량(L≥100m)		개소/m	4개소/1,340m
	보강토옹벽		m	1900.5
터 널 공			개소/m	1개소/740m
포 장 공	아 스 콘 표 층		a	3,492.4
	아 스 콘 중 간 층		a	891.6
	아 스 콘 기 층		a	1,081.6
	보 조 기 층		m3	29,533
	동 상 방 지 층		m3	-
	교면포장		m2	23,352
	보도포장		m2	1,338
	자전거도로포장		m2	-
	콘크리트포장		m3	3,822
부 대 공	가 드 레 일	노측용	경간(4m)	1,974
		중분대용	m	3,796
	교통표지판		개소	125
	안내표지판		개소	55
	방음벽		m	480