공공건축물 건립현황

1. 실버케어센터 건립공사

○ 위    치 : 중산동 252번지 일원, 대지면적 3,785㎡

○ 시설규모 : 지상3층, 연면적 2,079.05㎡

○ 사업기간 : 2020. 3월 ~ 2022. 6월

○ 사 업 비 : 8,500백만원(시설비 6,731 감리비 462 기타 1,307)

○ 추진상황 : 착공(2021. 7. 16.), 준공(2022. 6. 30.)

실버케어센터 조감도 및 공사사진

2. 송정복합문화센터 건립공사

○ 위    치 : 화봉동 1484-2번지, 대지면적 1,523㎡

○ 시설규모 : 지하1층/지상5층, 연면적 3,445.73㎡

○ 사업기간 : 2020. 1월 ~ 2022. 12월

○ 사 업 비 : 14,400백만원(시설비 11,100 감리비 900 기타 2,400)

○ 추진상황 : 착공(2021. 7. 28.), 준공(2023. 3. 31.)

송정복합문화센터 조감도 및 공사사진

3. 북구 장애인보호작업장 건립공사

○ 위    치 : 달천동 267번지, 대지면적 1,861㎡

○ 시설규모 : 지상3층, 연면적 744.16㎡

○ 사업기간 : 2021. 1월 ~ 2022. 8월

○ 사 업 비 : 2,596백만원(시설비 2,415 감리비 181)

○ 추진상황 : 착공(2021. 12. 13.), 준공(2022. 11. 30.)

북구 장애인보호작업장 조감도 및 공사사진

4. 북구 장애인복지관 건립공사

○ 위    치 : 창평동 764-4번지, 대지면적 1,212㎡

○ 시설규모 : 지하1층/지상3층, 연면적 2,073.163㎡

○ 사업기간 : 2022. 1월 ~ 2023. 2월

○ 사 업 비 : 9,967백만원(시설비 7,707 감리비 626, 기타 1,634 )

○ 추진상황 : 착공(2022. 1. 12.), 준공(2023. 5. 2.)

북구 장애인복지관 조감도 및 공사사진

5. 북구 바다도서관 건립공사

○ 위    치 : 산하동 1006-5번지, 대지면적 680.2㎡

○ 시설규모 : 지하1층/지상3층, 연면적 980.01㎡

○ 사업기간 : 2020. 12월 ~ 2023. 6월

○ 사 업 비 : 4,192백만원(시설비 3,881 감리비 298, 기타 13 )

○ 추진상황 : 착공(2022. 3. 20.), 준공예정(2023. 5. 19.)

북구 바다도서관 조감도 및 공사사진