정책실명제 중점관리 대상사업 사업내역서

① 정책사업명	(가칭)바다도서관 건립
② 추진배경	○ 우리구는 도서관 특화 도시로 7개의 구립 도서관이 권역별로 조성되어 있으나, 강동지역은 사립 작은도서관 3개소만 있음. ○ 지역주민의 독서ㆍ문화ㆍ교육을 아우르는 복합문화공간인 도서관 건립 필요성 대두
③ 사업개요	○ 위 치 : 북구 산하동 1006-5 ○ 규 모 : 대지 680.2㎡, 연면적 980㎡(지하1층, 지상4층 이하) ○ 주요시설 : 공공도서관(자료실, 다목적실 등), 다함께돌봄센터 ○ 사 업 비 : 3,962백만원(국 1,816, 시 1,073, 구 1,073) - 공공도서관 3,892(공사비 3,425, 설계비 156, 감리비 298, 부대비 13) - 다함께돌봄센터 70(리모델링+기자재비)
④ 사업부서	행정지원국 도서관과		⑤ 담당자	행정5급 정해우 행정7급 조수진
⑥ 선정기준	총사업비 10억 이상		⑦ 사업기간	‘19. 11월 ~ ’23. 6월
<그간 주요 추진내용>
○ 2020~2024년 중기지방재정계획 반영		‘19.09.12.	이득필 도서관과장 이미애 도서관정책주무관 강 정 주무관
○ 건립부지 선정 및 기본계획 수립		‘19.11.26.	이동권 구청장 최수미 부구청장 이문걸 행정지원국장 이득필 도서관과장 이미애 도서관정책주무관 강 정 주무관
○ 생활SOC 복합화 대상시설 신청		‘20.04.28.	김용근 도서관과장 이미애 도서관정책주무관 강 정 주무관
○ 생활SOC 복합화 대상시설 선정		‘20.09.24.	박현근 도서관과장 이미애 도서관정책주무관 조수진 주무관
○ 공유재산관리계획 심의		‘20.10.27.	박현근 도서관과장 이미애 도서관정책주무관 조수진 주무관
○ 지방재정투자심사		‘20.11.02.	박현근 도서관과장 이미애 도서관정책주무관 조수진 주무관
○ 건립계획 수립		‘20.11.27.	이동권 구청장 최수미 부구청장 김기항 행정지원국장 박현근 도서관과장 이미애 도서관정책주무관 조수진 주무관
○ 공사업무 추진 요청 (도서관과 → 건축주택과)		‘20.12.01.	박현근 도서관과장 이미애 도서관정책주무관 조수진 주무관
○ 공공건축 사업계획 사전검토 신청		‘20.12.22.	조수현 건축주택과장 최주목 공공시설주무관 장현실 주무관
○ 기본 및 실시설계용역 설계공모 계획		‘21.03.18.	이동권 구청장 김정익 부구청장 엄주복 안전건설국장 조수현 건축주택과장 최주목 공공시설주무관 장현실 주무관
○ 건축설계공모		‘21.03.22.	조수현 건축주택과장 최주목 공공시설주무관 장현실 주무관