정책실명 공개과제 사업내역서

① 정책사업명	오치골 공원 조성
② 추진배경	○ 오치골 공원을 활용한 주민들을 위한 산책·휴식의 공간 제공 ○ 인근 양정생활체육공원, 양정소공원, 오치골 등산로와 연계한 복합 주민 힐링공간 제공
③ 사업개요	○ 위 치 : 양정동 776-21번지 일원 (양정체육공원 마사토 구장) ○ 사업기간 : 2017. ~ 2020. ○ 사 업 량 : 주민쉼터 조성 7,839㎡ ○ 사업내용 : 생태모험놀이시설, 휴게·모임광장 등 설치 ○ 사 업 비 : 2,591백만원(국 800, 구 1,791)
④ 사업부서	안전건설국 공원녹지과	⑤ 담당자	김성하
⑥ 선정기준	총사업비 10억이상	⑦ 사업기간	‘17. 9. ~ ‘20. 12.
<그간 주요 추진내용>
○ ‘17. 9월 : ’18년 GB주민지원 사업 선정 ○ ‘17. 10월 : 재정투자심사(중기재정) 반영 ○ ‘18. 5월 : 시유지 3필지 토지보상 완료) ○ ‘18. 6월 : 사업인정 고시 ○ ‘18. 7월 : 실시계획 인가 ○ ‘18. 8월 : 최종 주민설명회 개최 ○ ‘18. 9월 : 오치골 공원 2단계 착공 ○ ‘18. 9월 : 수용재결 심의(지토위) ○ ‘18. 10월 : 수용재결 협의보상 완료 ○ ‘18. 12월 : 오치골 공원 공사 완료(2단계) ○ ‘19. 3월 : 토지보상(양정동 509) ○ ‘19. 3월 : 실시계획변경인가 분할면적변경 ○ ‘19. 5월 : 사업 추진(3차 사업분) ○ ‘20. 1월 : 토지보상(국유지-3필) ○ ‘20. 12월 : 사업완료 및 사후 모니터링		담당자 김성하 담당 백광현 과장 서준영 국장 김연식 부구청장 최수미 구청장 이동권

정책실명 공개과제 사업내역서

① 정책사업명

매곡공원 조성

② 추진배경

○ 신흥 주거지역으로 변모하고 있는 농소2동 일원에 대표적인 공원 조성으로 주민 여가활용 공간 제공

○ 일몰제 시행과 관련, 도시 내 유휴 방치된 근린공원에 대한 생태 휴식공간 조성

③ 사업개요

○ 위     치 : 북구 매곡동 479번지 일원(산골못, 매곡중학교 옆)

○ 면     적 : 11,400㎡(공원시설 3,689㎡, 녹지시설 7,711㎡)

구 분	합 계	사유지	국유지
면 적(㎡)	11,400	6,226	5,174
구성비(%)	100	54.61	45.39

○ 사업기간 : 2019. 1. ~ 2021. 12.

○ 사 업 비 : 13,100백만원(2019년 500,  2020년 12,600)

⇒ 보상비 11,000, 사업비 2,000, 설계비 등 100

○ 주요시설 : 광장, 데크무대, 나무그늘쉼터, 체력단련장  등

④ 사업부서

안전건설국 공원녹지과

⑤ 담당자

김성하

⑥ 선정기준

총사업비 10억이상

⑦ 사업기간

‘19. 1. ~ ‘21. 12.

<그간 주요 추진내용>

○ ‘00.  3월 : 도시계획(공원) 결정

(울고 제33호)

○ ‘15.  4월 : 공원조성계획 결정

(울고 제72호)

○ ‘18. 12월 : 투자심사(조건부),

市 중기지방재정계획 반영

○ ‘18. 12월 : 市 사업비 5억원 확보

(2019년 당초예산)

○ ‘19.  5월 : 市 사업비 35억원 확보(1회추경)

※ 예산재배정 사업으로 ‘북구’ 추진

○ ‘19.  6월 : 협의보상대상지 보상 추진

○ ‘19. 10월 : 실시계획인가

○ ‘19. 11월 이후 : 토지보상 및 공원조성

담당자 김성하

담당 백광현

과장 서준영

국장 김연식

부구청장 최수미

구청장 이동권