정책실명제 중점관리 대상사업 사업내역서

① 정책사업명	무지개아파트 일원 소방도로(소2-96호선) 개설
② 추진배경	신천동 무지개아파트 일원 지역의 좁은 도로와 인구증가에 따른 교통불편을 해소하고 재난 발생 시 소방차 진입불가 등 사고를 대비하고자 함
③ 사업개요	○ 위 치 : 신천동 745-24번지 일원 ○ 사업내용 : 도로개설 L=330m, B=8m ○ 사 업 비 : 6,141백만원(시 1,000 구 5,141)
④ 사업부서	건설과		⑤ 담당자	시설5급 조병석 시설7급 김성은
⑥ 선정기준	총 사업비 10억원 이상		⑦ 사업기간	'18. 5월 ~ '25. 12월
<그간 주요 추진내용>
○ 소2-96호선 1구간 준공		‘23.04.20.	조병석 건설과장 김광영 토목주무관 김성은 주무관
○ 소2-96호선 1구간 착공		‘23.04.20.	박근철 건설과장 노선화 토목주무관 김성은 주무관
○ 소2-96호선 1구간 철거공사		‘22.10.26.	이상식 건설과장 여주태 토목주무관 장해정 주무관
○ 소2-96호선 1구간 보상계획 열람공고		‘22.08.23.	이상식 건설과장 박영석 건설행정주무관 조진아 주무관
○ 소2-96호선 2구간 실시계획(변경)인가 고시		‘22.06.16.	이상식 건설과장 여주태 토목주무관 백선유 주무관
○ 토지분할 의뢰		‘22.05.25.	이상식 건설과장 여주태 토목주무관 백선유 주무관
○ 소2-96호선 1구간 실시계획(변경)인가 고시		‘21.04.29.	심웅보 건설과장 배성주 토목주무관 김성은 주무관
○ 보상협의		‘20.05.11.	심웅보 건설과장 정연석 건설행정주무관 이보근 주무관
○ 보상계획 열람공고		‘19.06.21.	조형래 건설과장 이동권 건설행정주무관 정승혁 주무관
○ 도시계획시설사업 실시계획인가		‘19.03.25.	김현동 안전정보과장 조형래 건설과장 서재교 토목주무관 김상진 주무관
○ 실시설계용역 시행 건의		‘18.05.04.	신동운 건설과장 서재교 토목주무관 이동혁 주무관