정책실명제 중점관리 대상사업 사업내역서

① 정책사업명	중산스포츠타운 조성사업
② 추진배경	대단위 아파트 밀집 및 인구유입에 따른 문화 인프라 구축으로 주민들에게 체육시설 공간 마련
③ 사업개요	○ 위 치 : 중산동 산126번지 일원 ○ 규 모 : 부지면적 84,169㎡ ○ 주요시설 : 축구장, 관리동, 다목적광장, 주차장 등 ○ 사 업 비 : 19,700백만원
④ 사업부서	문화체육과		⑤ 담당자	행정5급 이동권 시설7급 백선유
⑥ 선정기준	총 사업비 10억원 이상		⑦ 사업기간	‘20. 10월 ~ ‘25. 12월
<그간 주요 추진내용>
○ 매장유산 정밀발줄조사 용역 시행 건의 및 계약의뢰 ○ 정밀발굴 조사를 위한 벌목 및 임목파쇄 공사 계약 의뢰		‘24. 7월 ~ 현재	박천동 구청장 노동완 부구청장 이옥선 경제문화국장 이동권 문화체육과장 이재민 체육지원팀장 최동현 주무관
○ 지방토지수용위원회 개최 ○ 문화재 표본조사 용역 시행 ○ 매장유산 정밀발줄조사 용역 계약심사 의뢰 ○ 정밀발굴 조사를 위한 벌목 및 임목파쇄 공사 계약심사 의뢰		‘24. 6월	김성철 문화체육과장 이재민 체육지원팀장 최동현 주무관
○ 문화재 표본조사 결과서 제출 및 반영		‘24. 5월	김성철 문화체육과장 이재민 체육지원팀장 최동현 주무관
○ 계약심의위원회 심의완료 ○ 사업계획변경 신청		‘24. 4월	김성철 문화체육과장 이재민 체육지원팀장 최동현 주무관
○ 市 계약심사 및 일상감사, 건설사업관리용역 등 행정절차 진행		‘24. 2월 ~ 4월	김성철 문화체육과장 이재민 체육지원팀장 최동현 주무관
○ 제1차 울산광역시 지방투자심사 조건부 통과 ○ 실시설계용역 완료		‘24. 2월	김성철 문화체육과장 이재민 체육지원팀장 최동현 주무관
○ 지방토지수용위원회 신청		‘24. 2월	김성철 문화체육과장 이재민 체육지원팀장 최동현 주무관
○ 문화재 표본조사를 위한 벌목 및 벌개제근 시행 ○ 토지보상 2차 협의 시행		‘24. 1월	김성철 문화체육과장 이재민 체육지원팀장 최동현 주무관
○ 감정평가에 따른 손실보상금 협의 시행		‘23. 12월	김성철 문화체육과장 이재민 체육지원주무관 최동현 주무관
○ 미보상 토지 감정평가 결과		‘23. 11월	노동완 부구청장 권오걸 행정지원국장 김성철 문화체육과장 이재민 체육지원주무관 최동현 주무관
○ 소규모환경영향평가 협의완료 ○ 문화재 현상변경심의 신청 ○ 실시계획인가 고시		‘23. 11월	김성철 문화체육과장 이재민 체육지원주무관 최동현 주무관
○ 제4차 울산광역시 투자심사 (재검토)		‘23. 10월	김성철 문화체육과장 이재민 체육지원주무관 최동현 주무관
○ 공공디자인심의 신청		‘23. 9월	김성철 문화체육과장 이재민 체육지원주무관 최동현 주무관
○ 공사기간 적정성 검토		‘23. 8월	김성철 문화체육과장 이재민 체육지원주무관 최동현 주무관
○ 소규모환경영향평가 협의신청 ○ 재해영향평가 협의신청 ○ 설계의 적정성 및 경제성 검토 요청		‘23. 7월	김성철 문화체육과장 이재민 체육지원주무관 최동현 주무관
○ 장애물 없는 생활환경(BF) 예비인증 신청		‘23. 6월	한영석 문화체육과장 이재민 체육지원주무관 최동현 주무관
○ 중산스포츠타운 조성사업 교통안전심의 신청		‘23. 3월	한영석 문화체육과장 이재민 체육지원주무관 최동현 주무관
○ 실시설계용역 중간보고회 개최		‘23. 2월	박천동 구청장 김정익 부구청장 허사영 행정지원국장 한영석 문화체육과장 이재민 체육지원주무관 최동현 주무관
○ 추진방안 결정에 따른 실시설계 용역 설계변경		’22. 12월	박천동 구청장 김정익 부구청장 김정열 행정지원국장 한영석 문화체육과장 이재민 체육지원주무관 최동현 주무관
○ 주민설명회 개최 및 향후 추진방안 결정 ○ 실시설계 용역 일시정지 해제		’22. 11월	박천동 구청장 김정익 부구청장 김정열 행정지원국장 한영석 문화체육과장 이재민 체육지원주무관 최동현 주무관
○ 실시설계 용역 일시정지		’22. 6월	이동권 구청장 김정익 부구청장 조여문 행정지원국장 박은정 문화체육과장 박완호 체육지원주무관 김규헌 주무관
○ 보상계획 열람공고		‘21. 10월	박은정 문화체육과장 박완호 체육지원주무관 김규헌 주무관
○ 실시설계용역 착수		‘21. 9월	박은정 문화체육과장 박완호 체육지원주무관 김규헌 주무관
○ 시(市) 지방재정투자사업 심사 (조건부, 2단계)		‘21. 2월	이동권 구청장 김정익 부구청장 조여문 행정지원국장 박은정 문화체육과장 박완호 체육지원주무관 장해정 주무관
○ ‘20. 10월 : 도시관리계획결정 입안 신청 ○ ‘20. 11월 : 공유재산 관리계획 승인 및 중기지방재정계획 반영 ○ ‘20. 12월 : 도시관리계획시설(체육시설) 결정 및 지형도면 고시		‘20. 10월 ~ 12월	이동권 구청장 최수미 부구청장 이문걸 행정지원국장 정미옥 문화체육과장 전민성 체육지원주무관 김경륜 주무관