정책실명제 중점관리 대상사업 사업내역서

① 정책사업명	천(川)걸음 이화정마을 도시재생뉴딜
② 추진배경	지속적 인구감소, 노후화 등 도시기반시설과 주거환경이 점점 열악해져가고 있는 이화·화정을 지역주민 등이 협력하여 종합적으로 활성화 시키고자 국토교통부 도시재생사업을 통해 추진
③ 사업개요	○ 위 치 : 중산동 이화1길 일원(A=86,190㎡) ○ 사업내용 : 우회전 해소길 조성, 이화1길 정비사업, 이음다리 신설, 소방도로 개설, 마을주차장 조성, 건강지원센터, 어울림/창작/행복맞춤센터 건립, 현장지원센터 운영, 주민역량강화 등 ○ 사 업 비 : 23,971백만원 (국 11,029 시 7,720 구 3,309 민간 15 기금 1,150 자체 748)
④ 사업부서	도시과		⑤ 담당자	시설5급 박근철 시설8급 민성욱
⑥ 선정기준	총 사업비 10억원 이상		⑦ 사업기간	'20. 1월 ~ '24. 12월
<그간 주요 추진내용>
○ 이화천 아름다리 개설공사 준공		‘24.08.06.	박근철 도시과장 한일성 도시재생팀장 민성욱 주무관
○ 청소년 창작센터&여성행복맞춤센터 건립공사 준공		‘24.06.26.	박근철 도시과장 한일성 도시재생팀장 정재식 주무관
○ 이화1길 정비사업 및 도로시설물 설치공사 준공		‘24.06.07.	박근철 도시과장 오현석 전략사업팀장 민성욱 주무관
○ 건강생활지원센터 건립공사 준공		‘24.01.31.	박근철 도시과장 한일설 도시재생팀장 정재식 주무관
○ 이화정 어울림센터 건립공사 준공		‘23.10.20.	박근철 도시과장 한일성 도시재생주무관 정재식 주무관
○ 이화화정 이음다리 개설공사 준공		‘23.07.25.	박근철 도시과장 이선우 전략사업주무관 유나영 주무관
○ 이화천 안전보행길 조성공사 준공		‘23.07.20.	박근철 도시과장 이선우 전략사업주무관 유나영 주무관
○ 이화마을 주차장 조성공사 준공		‘23.07.20.	박근철 도시과장 한일성 도시재생주무관 정재식 주무관
○ 이화화정쉼터 조성사업 준공		‘23.06.13.	최혁재 도시과장 이선우 전략사업주무관 강지희 주무관
○ 마을안심 골목길 조성사업 준공		‘23.04.28.	최혁재 도시과장 이선우 전략사업주무관 유나영 주무관
○ 소방도로 개설공사 준공		‘23.02.14.	최혁재 도시과장 한일성 도시재생주무관 김병현 주무관
○ 우회전해소길 개설공사 준공		‘22.09.30.	최혁재 도시과장 오만평 도시재생시설주무관 김규석 주무관
○ 집수리지원사업 준공(2차)		‘22.09.28.	최혁재 도시과장 오만평 도시재생시설주무관 김규석 주무관
○ 이화화정 어린이 놀이터 준공		‘22.08.24.	김용회 도시행정주무관 오만평 도시재생시설주무관 김병현 주무관
○ 집수리지원사업 준공(1차)		‘21.11.27.	최혁재 도시과장 오만평 도시재생주무관 김규석 주무관
○ 위탁사업 기본설계용역 입찰 ○ 시설사업 실시설계용역 입찰		‘21. 2월	엄주복 안전건설국장 최혁재 도시과장 오만평 도시재생주무관 김근덕 주무관/강상원 주무관/ 전민지 주무관
○ 활성화계획 고시		‘20.02.27.	이동권 구청장 최수미 부구청장 김연식 건설도시국장 홍승진 도시과장 박진섭 도시재생주무관 정현준 주무관
○ 공모선정		‘19. 10월	이동권 구청장 최수미 부구청장 김연식 건설도시국장 홍승진 도시과장 박진섭 도시재생주무관 정현준 주무관