울산광역시 고시 제2020 - 47호

주택건설사업계획 변경승인 고시

울산광역시 북구 매곡동 481-1번지 외 94필지 주택건설사업계획변경승인 신청에 대하여「주택법」제15조, 같은 법 시행규칙 제13조에 따라 변경승인하고, 같은 법 시행령 제30조에 따라 아래와 같이 고시합니다.

2020년  2월  13일

울 산 광 역 시 장

1. 사업계획 변경승인

가. 사업시행자

1) 사업의 명칭 : 주택건설사업[공동주택(아파트) 및 부대․복리시설]

2) 사업주체

가. 성 명 : 중산매곡지역주택조합 조합장 차기환/아이에스동서(주) 대표 권민석

나. 주 소 : 울산광역시 남구 신천로 55-21, 3층/서울특별시 강남구 영동대로 741번지

3) 사업위치 : 울산광역시 북구 매곡동 481-1번지 외 94필지

나. 사업개요

구 분	기 정	변 경	비 고
사 업 주 체	중산매곡지역주택조합 조합장 차기환, 아이에스동서(주) 대표 권민석	중산매곡지역주택조합 조합장 차기환, 아이에스동서(주) 대표 권민석	변경없음
사 업 위 치	울산광역시 북구 매곡동 481-1번지외 94필지	울산광역시 북구 매곡동 481-1번지외 94필지	변경없음
대 지 면 적	37,160.50㎡	37,160.50㎡	변경없음
건 축 면 적	8,404.4249㎡	8,346.4649㎡	변경
연 면 적	121,051.5899㎡	121,051.5899㎡	변경없음
건 폐 율	22.62%	22.46%	변경
용 적 률	240.97%	240.97%	변경없음
동 수(주/부)	주: 12개동, 부속: 10개동	주: 12개동, 부속: 10개동	변경없음
세 대 수	851세대	851세대	변경없음
주 택 형 별	지역주택조합아파트, (민간)분양아파트	지역주택조합아파트, (민간)분양아파트	변경없음
사 업 비	312,217,663천원	312,217,663천원	변경없음

다. 주요 변경내용

1) 사업시행기간 변경

2) 근린생활시설동 구획, 구조, 창호, 전기·통신·소방시설 등 변경

3) 근린생활시설동 품질 및 기능 향상을 위한 변경 등

2. 사업시행기간

구 분	기 정	변 경
사업시행기간	2018. 12. 1. ~ 2021. 6. 30.	2019. 4. 1. ~ 2021. 10. 31.

3. 법률의 의한 인‧허가 등의 의제 등

- 해당없음

4. 승인관련서류 : 울산광역시(건축주택과), 울산광역시 북구청(건축주택과)에 비치하여  이해관계인에게 보입니다.