허 가 조 건(변경)

◉ 공사명 : 매곡동 푸르지오아파트 우․오수관로 매설공사

1.  당초허가조건을 승계함.

2.  점용기간

ｏ 당 초 :  2007. 07. 13. ~ 2007. 08. 06.(25일간)

ｏ 변 경 :  2007. 07. 13. ~ 2007. 08. 13.(증7일)

3.  다음 사항을 이행한 후 사업시행 하여야 함

○ 도로점용 추가 사용료

ｏ 면적 959.46㎡, 계 ￦982.800원(시비)을 우리구에 납부(부가가치세 미포함)

○ 원상복구부담금(보증보험증권)

ｏ ￦33,036,220원 --→변경없음

○ 하자보수보증금(총 도로원상복구 내역의 3/100 - 준공검사일로부터 2년간).

ｏ ￦991,080원 --→변경없음

○ 지역개발공채(총점용료의 5/100)

ｏ 추가 매입액 : ￦45,000원

○ 면 허 세

ｏ ￦27,000원 --→변경없음