울산광역시 고시 제2010 - 12호

산업단지개발사업 실시계획【 기간연장 】승인 고시

울산․미포국가산업단지내 산업단지개발사업에 대하여 「산업입지 및 개발에 관한 법률」제17조의 규정에 의거 아래와 같이 실시계획(변경)승인하고, 같은법 제19조의 2 규정에 의거 고시합니다.

2010년  01월  21일

울 산 광 역 시 장

1.기간연장내역

사업시행자	위 치	면적(㎡)	사 업 기 간	현 실 태	연 기 사 유
(주)신영	북구 효문동 212-1번지 일원	7,515	‘08. 11 ~ ’09.12.31	부지매입협의	토지매입지연
			‘08. 11 ~ ’10.12.31
한국수력원자력(주)	북구 일부지역	74,040	‘96. 04 ~ ’09.12.31	사업공정90%	‘10년도준공준비
			‘96. 04 ~ ’10.12.31
(주)태현엔지니어링	북구 효문동 307-3번지일원	3,686	‘07. 12 ~ ’09.12.31	부지매입완료	경계부분 업무협의및준공준비
			‘07. 12 ~ ’10.12.31
현대자동차(주)	북구 염포동 423-1번지일원	343,194	‘86. 07 ~ ’09.12.31	부지매입완료	국유지무상귀속협의지연
			‘86. 07 ~ ’10.12.31
현대자동차(주)	북구 양정동 367-1번지일원	67,359	‘86. 04 ~ ’09.12.31	부지매입완료	‘10년도 준공준비
			‘86. 04 ~ ’10.12.31
현대자동차(주)	북구 양정동 336번지일원	370,853	‘85. 09 ~ ’09.12.31	부지매입완료	‘대3-15호선개설폐지
			‘85. 09 ~ ’10.12.31
현대자동차(주)	북구 효문동 615번지일원	10,752	‘97. 05 ~ ’09.12.31	부지매입완료	‘10년도 준공준비
			‘97. 05 ~ ’10.12.31
새한주유소	북구 명촌동 222번지외1필지	5,101	‘05. 10 ~ ’09.12.31	부지매입완료	공사지연 ‘10준공준비
			‘05. 10 ~ ’10.06.30
강남기계공업 (주)	북구 연암동 663-8번지	1,890	‘95. 11 ~ ’09.12.31	부지매입완료	인근부지 경계조정후 준공
			‘95. 11 ~ ’10.12.31
시민의발서비스(주)	북구 효문동746-1번지외10필지	8,506	‘92. 10 ~ ’09.12.31	조계종옥천암부지협의	토지매입지연
			‘92. 10 ~ ’10.12.31
(주)한일	북구 효문동 769-5번지외 16필지	6,779.7	‘06.11~’09.12.31	부지매입협의	수용재결준비
			‘06.11~’10.12.31
(합)부림공업사	북구 연암동 220번지일원	4,134	‘94.03~’09.12.30	잔여지협의	잔여국유지 협의중
			‘94.03~’10.03.31
(주)남해금속	북구 효문동 420번지외 6필지	4,695	‘84.10~’09.12.31	기부채납준비	기부채납부지 근저당 해제
			‘84.10~’10.12.31
동성공업(주)	북구 효문동 353-5번지	8,062	84.1~’09.12.31	구거부지매입준비	한국토지주택공사 도로개설 지연
			84.1~’10.12.31

2. 수용 또는 사용할 토지세목조서 (게재생략)

3. 관계도서는 울산광역시청 도시개발과(☏229-4381)와 북구 도시녹지과에 비치하고, 이해 관계인에게 보입니다  (관계도서 게재 생략)