울산광역시 고시 제2010 - 194호

산업단지개발사업 실시계획변경【 기간연장 】승인 고시

울산․미포국가산업단지 내 산업단지개발사업에 대하여 「산업입지 및 개발에 관한 법률」제17조 및 같은 법 제19조의2에 따라 아래와 같이 실시계획변경(기간연장)을 승인하고, 고시합니다.

2010년  07월 22일

울 산 광 역 시 장

1. 기간연장내역

번호	시행자	위치	면적(㎡)	실시계획 승인	사업 기간		현실태	연장 사유
					당초	변경
1	한국TRW(주) 대표 민병수	북구 효문동 753번지 일원	11,019	‘87.06.25	‘87.06~ ‘10.06.30	‘87.06~ ‘10.12.31	공장 가동중	건축물 보상협의
2	다운산업 대표 엄상섭	북구 효문동 603-1번지 일원	2,455	‘09.05.22	‘09.04~ ‘10.04.30	‘09.04.~ ‘10.12.31	공장 가동중	토목공사 마무리
3	새한주유소 대표 박동철	북구 명촌동 222번지 일원	5,101	‘05.11.01	‘05.10~ ‘10.06.30	‘05.10~ ‘10.12.31	공장 가동중	토목공사 마무리
4	영남물류산업 대표 김웅일	북구 연암동 220-2번지 일원	1,764	‘09.04.15	‘09.01~ ‘10.06.30	‘09.01~ ‘11.06.30	공장 가동중	사업부지 경계조정 협의중

2. 수용 또는 사용할 토지세목조서 : 면적변경이 없어 게재생략

3. 관계도서는 울산광역시청 도시개발과(☏229-4386)와 북구청 도시녹지과에 비치하고, 이해 관계인에게 보입니다  (관계도서 게재 생략)