울산광역시 고시 제2010 - 306호

산업단지개발사업 실시계획변경(기간연장) 승인 고시

울산․미포국가산업단지내 산업단지개발사업에 대하여「산업입지 및 개발에 관한 법률」제17조 및 제19조의2의 규정에 의거 아래와 같이 실시계획변경(기간연장) 승인하고 고시합니다.

2010년  12월 23일

울 산 광 역 시 장

1. 기간연장 승인내역

연번	사업시행자	위치	면적 (㎡)	실시계획 승인	사업기간		연장사유
					당초	변경
1	메티아(주)	효문동 750-1	8,440	09.02.23	09.02.23 ~ 10.12.31	09.02.23 ~ 11.03.31	국유지 매수지연
2	(주)한백	연암동 179-3	3,792	04.03.02	04.03.02 ~ 10.12.31	04.03.02 ~ 11.06.30	토지매수 지연
3	다운산업	효문동 603-1	2,455	09.05.12	09.05.12 ~ 10.12.31	09.05.12 ~ 11.12.31	토목공사 마무리
4	대소정공	효문동 434-4	75	04.04.01	04.04.01 ~ 10.12.31	04.04.01 ~ 11.12.31	토지매수 지연
5	동국실업(주)	연암동 728	4,228	06.07.12	06.07.12 ~ 10.12.31	06.07.12 ~ 11.12.31	토지매수 지연
6	두올상사	효문동 286	8,398	87.02.17	87.02.17 ~ 10.12.31	87.02.17 ~ 11.12.31	토지매수 지연
7	새한주유소	명촌동 222	5,101	05.11.01	05.11.01 ~ 10.12.31	05.11.01 ~ 11.12.31	토목공사 마무리
8	시민의발 정비서비스(주)	효문동 746-1	8,506	92.10.15	92.10.15 ~ 10.12.31	92.10.15 ~ 11.12.31	토지매수 지연
9	연암자동차 운전학원	연암동 636	12,182	96.10.31	96.10.31 ~ 10.12.31	96.12.31 ~ 11.12.31	토목공사 마무리
10	효문공업사	효문동 664	3,456	92.12.05	92.12.05 ~ 10.12.31	92.12.05 ~ 11.12.31	토지매수 지연

2. 수용 또는 사용할 토지세목조서 : 변경사항 없음

3. 관계도서는 울산광역시청 도시개발과(☏229-4386)와 북구청 도시녹지과에 비치하고, 이해관계인에게 보입니다.(관계도서 게재 생략)