울산광역시 고시 제2010 - 328호

산업단지개발사업 실시계획변경(기간연장) 승인 고시

울산․미포국가산업단지내 산업단지개발사업에 대하여「산업입지 및 개발에 관한 법률」제17조 및 제19조의2의 규정에 의거 아래와 같이 실시계획변경(기간연장) 승인하고 고시합니다.

2010년  12월 30일

울 산 광 역 시 장

1. 기간연장 승인내역

연번	사업시행자	위치	면적 (㎡)	실시계획 승인	사업기간		연장사유
					당초	변경
1	두례산업	연암동 663-6	4,657	07.04.17	07.04.17 ~ 10.12.31	07.04.17 ~ 11.12.31	토지매수 지연
2	명성공업(주)	진장동 935-3	5,884	04.05.29	04.05.29 ~ 10.12.31	04.05.29 ~ 11.12.31	토지매수 지연
3	우영산업(주)	연암동 714-15	21,296	85.11.25	85.11.25 ~ 10.12.31	85.11.25 ~ 11.12.31	토목공사 미준공
4	한국수력 원자력(주)	효문동~연암동	74,040	96.07.10	96.07.10 ~ 10.12.31	96.07.10 ~ 11.12.31	토목공사 미준공
5	한일이화(주)	연암동 564-3	11,022	01.12.27	01.12.27 ~ 10.12.31	01.12.27 ~ 11.12.31	토목공사 미준공
6	해종하이텍 (주)	효문동 343-11	4,588	09.08.31	09.08.31 ~ 10.12.31	09.08.31 ~ 11.06.30	토목공사 미준공
7	현대자동차 (주)	염포동 423-1	343,194	86.12.17	86.12.17 ~ 10.12.31	86.12.17 ~ 11.12.31	확정측량 미완료
8	현대자동차 (주)	양정동 336	370,853	92.10.15	85.09.16 ~ 10.12.31	85.12.31 ~ 11.12.31	토목공사 미준공
9	현대자동차 (주)	양정동 367-1	67,359	86.06.02	86.06.02 ~ 10.12.31	86.06.02 ~ 11.12.31	확정측량 미완료

2. 수용 또는 사용할 토지세목조서 : 변경사항 없음

3. 관계도서는 울산광역시청 도시개발과(☏229-4386)와 북구청 도시녹지과에 비치하고, 이해관계인에게 보입니다.(관계도서 게재 생략)