울산광역시 고시 제2012 - 277호

산업단지개발사업 실시계획 변경(기간연장) 승인 고시

울산․미포국가산업단지 내 산업단지개발사업에 대하여「산업입지 및 개발에 관한 법률」제17조의2 및 제19조의2 규정에 의하여 다음과 같이 산업단지개발사업 실시계획 변경(기간연장) 승인하고 이를 고시합니다.

2012년  12월  13일

울 산 광 역 시 장

1. 사업현황

연번	사업시행자	위치	면적 (㎡)	실시계획 승인	사업기간		연장사유
					당초	변경
1	덕산하이 메탈(주)	북구 연암동 652-1	8,055	12.01.12	12.01.12 ~ 12.12.31	12.01.12 ~ 13.12.31	토지매수 지연
2	(주)동신 공업사	북구 연암동 704	4,992	10.12.30	10.12.30 ~ 12.12.31	10.12.30 ~ 13.12.31	동해남부선 철도공사 연계
3	(주)한국 자산개발	북구 연암동 827-6	14,852	05.12.22	05.12.22 ~ 12.12.31	05.12.22 ~ 13.12.31	토지매수 지연

2. 수용 또는 사용할 토지조서 : 변경 없음

3. 관계도서 및 기타 승인사항 : 게재 생략

4. 기타 상세한 사항은 울산광역시 도시개발과(052-229-4384)에 문의하시기 바랍니다.  끝.