울산광역시 고시 제2012 - 291호

산업단지개발사업 실시계획 변경(기간연장) 승인 고시

울산․미포국가산업단지 내 산업단지개발사업에 대하여「산업입지 및 개발에 관한 법률」제17조의2 및 제19조의2 규정에 의하여 다음과 같이 산업단지개발사업 실시계획 변경(기간연장) 승인하고 이를 고시합니다.

2012년  12월  27일

울 산 광 역 시 장

1. 사업현황

연번	사업시행자	위치	면적 (㎡)	실시계획 승인	사업기간		연장사유
					당초	변경
1	동국실업 (주)	북구 연암동 691-1	10,298	06.07.12	06.07.12 ~ 12.12.31	06.07.12 ~ 13.12.31	토지매수 지연
2	(주)세명 아이티씨	북구 연암동 529-1	3,089	12.04.09	12.04.09 ~ 12.12.31	12.04.09 ~ 13.06.30	토지매수 지연
3	(주)아일	북구 효문동 769-5	6,787.7	11.01.20	11.01.20 ~ 12.12.31	11.01.20 ~ 13.06.30	토지매수 지연

2. 수용 또는 사용할 토지조서 : 변경 없음

3. 관계도서 및 기타 승인사항 : 게재 생략

4. 기타 상세한 사항은 울산광역시 도시개발과(052-229-4384)에 문의하시기 바랍니다.  끝.