울산광역시 고시 제2013 - 274호

산업단지개발사업 실시계획변경(기간연장) 승인 고시

울산․미포국가산업단지 내 산업단지개발사업에 대하여「산업입지 및 개발에 관한 법률」제17조의2에 의거 산업단지개발사업 실시계획 변경(기간연장) 승인하고「같은 법」19조의2에 따라 다음과 같이 고시합니다.

2013년  12월  12일

울 산 광 역 시 장

1. 산업단지개발사업 실시계획 변경(기간연장)승인 현황

연번	사업시행자	위치	면적 (㎡)	사업기간		연장사유
				당초	변경
1	두례산업 대표 라두례	북구 연암동 663-6번지일원	4,657	‘07.04.17 ~ ‘12.12.31	‘13.12.31 ~ ‘14.12.31	- 부지매수 지연
2	현대자동차(주) 대표이사 김충호	북구 염포동 423-1번지	343,194	‘86.12.17 ~ ‘13.12.31	‘86.12.17 ~ ‘15.12.31	- 확정측량 지연
3	현대자동차(주) 대표이사 김충호	북구 양정동 336번지일원	370,853	‘85.09.16 ~ ‘13.12.31	‘85.09.16 ~ ‘15.12.31	- 도로개설 지연
4	현대자동차(주) 대표이사 김충호	북구 양정동 367-1번지일원	67,359	‘86.06.02 ~ ‘13.12.31	‘86.06.02 ~ ‘14.12.31	- 확정측량 지연
5	현대자동차(주) 대표이사 김충호	북구 효문동 260번지일원	10,890	‘10.11.04 ~ ‘13.12.31	‘10.11.04 ~ ‘14.12.31	- 부지매수 지연
6	시민의발 정비서비스(주) 대표이사 김성주	북구 효문동 746-1번지일원	8,506	‘92.10.15 ~ ‘13.12.31	‘92.10.15 ~ ‘14.12.31	- 공사지연
7	(주)한국자산개발 대표이사 장현지	북구 연암동 663-30번지일원	14,852	‘05.12.22 ~ ‘13.12.31	‘05.12.22 ~ ‘14.12.31	- 부지매수 지연
8	(주)동신공업사 대표이사 황종섭	북구 연암동 704번지일원	4,992	‘10.12.30 ~ ‘13.12.31	‘10.12.30 ~ ‘14.12.31	- 동해남부선 철도공사 간섭으로 인한 사업지연

연번	사업시행자	위치	면적 (㎡)	사업기간		연장사유
				당초	변경
9	(주)아일 대표이사 박창섭	북구 효문동 769-5번지일원	6,787.7	‘11.01.20 ~ ‘13.12.31	‘11.01.20 ~ ‘14.12.31	- 부지매수 지연
10	덕산하이메탈(주) 대표이사 이준호	북구 연암동 652-1번지일원	8,055	’12.01.12 ~ ‘13.12.31	’12.01.12 ~ ‘15.12.31	- 부지매입 및 지장물철거 지연
11	대신강업(주) 대표이사 강우성	북구 효문동 420번지일원	2,757	‘12.08.23 ~ ‘13.12.31	‘12.08.23 ~ ‘14.12.31	- 공사지연
12	권 일 병	북구 연암동 71-1번지일원	311	‘12.11.15 ~ ‘13.12.31	‘12.11.15 ~ ‘14.12.31	- 확정측량 지연

2. 수용 또는 사용할 토지조서 : “게재생략“

3. 관계도서 및 기타 승인사항  : “게재생략“

4. 기타 상세한 사항은 주무관청인 울산광역시 도시개발과(052-229-4384)와 사업 시행자에 문의하시기 바랍니다. “끝“