산업통상자원부고시제2013-177호

전원개발사업 실시계획(변경)

① 산업자원부 고시 제2007-138호(’07.12.06), 지식경제부 고시 제2011-36호(’11.03.14), 지식경제부 고시 제2011-143호(’11.07.13), 지식경제부 고시 제2013-14호(’13.04.29)로 고시한바 있는 765kV 신고리-북경남 송전선로(제1구간) 건설사업, ② 산업자원부 고시 제2007-138호(’07.12.06), 지식경제부 고시 제2010-114호(’10.06.09), 지식경제부 고시 제2010-162호(’10.09.28), 지식경제부 고시 제2011-36호(’11.03.14), 지식경제부 고시 제2011-78호(’11.05.13), 지식경제부 고시 제2013-14호(’13.04.29)로 고시한바 있는 765kV 신고리-북경남 송전선로(제2구간) 건설사업, ③ 산업자원부 고시 제2007-145호(’07.12.26), 지식경제부 고시 제2008-164호(’08.11.11), 지식경제부 고시 제2010-206호(’10.11.05), 지식경제부 고시 제2011-36호(’11.03.14), 지식경제부 고시 제2012-65호(’12.04.03)로 고시한바 있는 345kV 북경남분기 송전선로 건설사업, ④ 지식경제부 고시 제2011-143호(’11.07.13), 지식경제부 고시 제2012-174호(’12.08.01)로 고시한바 있는 345kV 동울산변전소 건설사업, ⑤ 지식경제부 고시 제2011-143호(’11.07.13), 산업통상자원부 고시 제2013-107호(’13.09.12)로 고시한바 있는 154kV 삼호-화원 송전선로 건설사업을 위한 전원개발사업실시계획에 대하여 전원개발촉진법 제5조 제2항의 규정에 의하여 변경된 내용을 다음과 같이 고시하며, ⑥ 산업통상자원부 고시 제2013-164호(‘13.11.26)로 고시한바 있는 154kV 여천#2-율촌 송전선로 건설사업에 대하여 다음과 같이 정정 고시합니다.

2013년 12월   일

산 업 통 상 자 원 부 장 관

765kV 신고리-북경남 송전선로(제1구간) 건설사업(변경)

1. 사업의 명칭 : 765kV 신고리-북경남 송전선로(제2구간) 건설사업

2. 사업시행자의 성명 및 주소 : 한국전력공사 사장 조 환 익

서울특별시 강남구 영동대로 512

3. 변경사유

○ 송전선로 설치('14.08) 및 훼손지 복구 기간(14개월) 추가 소요에 따른 사업기간 연장

4. 변경내역

○ 사업시행 기간

변 경 전	변 경 후	비 고
2007. 11 ∼ 2013. 12 (74개월)	2007. 11 ∼ 2015. 10 (96개월)	22개월 연장

345kV 동울산변전소 건설사업(변경)

1. 사업의 명칭 : 345kV 동울산변전소 건설사업

2. 사업시행자의 성명 및 주소 : 한국전력공사 사장 조 환 익

서울특별시 강남구 영동대로 512

3. 변경사유

○ 기기설치 및 가압 완료('14.12) 예정에 따른 사업기간 연장

○ 주변압기 추가 설치에 따른 전원설비의 사양 변경

4. 변경내역

○ 사업시행 기간

변 경 전	변 경 후	비 고
2011. 6. ～ 2013. 12. (30개월)	2011. 6. ～ 2014. 12. (42개월)	12개월 연장

○ 전원설비의 사양

변 경 전	변 경 후	비 고
○ 주변압기 : - 345/154kV 133.3/166.7MVA ×3대×2Bank (최종 4Bank) ○ 개폐장치 - 362kV GIS 10CB × 1식 - 170kV GIS 12CCT × 1식 ○ 부속설비 : 본관건물 1동	○ 주변압기 : - 345/154kV 133.3/166.7MVA ×3대×3Bank (최종 4Bank) ○ 개폐장치 - 362kV GIS 11CB × 1식 - 170kV GIS 13CCT × 1식 ○ 부속설비 : 본관건물 1동	1Bank 증가 1CB 증가 1CCT 증가 변경없음