울산광역시 북구 공고 제2017 - 905호

도시계획시설 도로 및 소공원 조성사업

실시계획(변경)인가를 위한 열람공고

도시계획시설 도로(대로2-1호선, 소로3-보80호선) 및 소공원(90호, 91호)조성사업 실시계획(변경)인가를 위하여「국토의 계획 및 이용에 관한 법률」제90조 및 같은법 시행령 제99조의 규정에 의거 아래와 같이 공고하오니 토지소유자 및 이해관계인 등은 보시기 바라며, 의견 있으신 분은 열람기간 내 서면으로 제출하여 주시기 바랍니다.

2017년  8월  10일

울산광역시 북구청장

1. 사업의 종류 및 명칭

가. 종  류 : 도로(대로2-1호선 외 1개노선) 및 소공원 조성을 위한 도시계획시설사업

나. 명  칭 : 도시계획시설 (도로·공원)사업

2. 위    치 : 울산광역시 북구 효문동 535번지 일원

3. 사업개요 : 도로(대로2-1) L=144m, B=1~2m, 도로(소로3-보80) L=73m, B=3m

소공원(90호) A=333㎡, 소공원(91호) A=1,413㎡

4. 사업시행자의 성명 및 주소

가. 성  명 : 현대효문지역주택조합 조합장 박성근 외2인

나. 주  소 : 울산광역시 북구 진장로 8, 2층

5. 사업기간 : (당초) 2016. 02. 18. ~ 2017. 07. 31.

(변경) 2016. 02. 18. ~ 2018. 01. 31.

6. 변경사유 : 실시계획인가 후 관계기관 협의 및 착공 준비로 인해 착공이 지연되었으며 아파트 공사일정에 맞춰 공사가 진행됨에 따라 부득이 사업기간 6개월 연장하여 사업을 완료토록 하고자 함.

7. 수용할 토지ㆍ지번ㆍ지목 및 소유권이외의 권리의 명세서

: 붙임 명세서와 같음

8. 열람기간 : 공보 게재 익일로부터 14일간

9. 열람장소 : 울산광역시 북구청 도시과

10. 기타 관계도서는 열람장소에 비치하오니 열람하시고 궁금하신 사항은 울산광역시 북구청 도시과(☎052-241-7914)로 문의하시기 바랍니다.